109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 고성군에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
고성군 청소년수련관 건립	8,680	4,417	3,680	583	-	2021	2015	90
고성군 작은영화관 건립사업	3,383	97	3,286	-	-	2020	2015	100
간사지 갈대습지 생태공원 조성사업	5,040	40	600	1,400	3,000	2024	2020	10
고성 해양치유센터 건립사업	35,400	400	1,400	3,000	30,600	2023	2019	10
고성군 향토역사관 건립	2,520	122	2,111	287	-	2021	2019	88
당항만 둘레길 탐방로 설치사업	3,900	669	2,976	255	-	2020	2017	100
상족암군립공원 사유지 매수사업	34,000	1,000	100	100	32,800	2038	2019	10
상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업	4,560	1,110	100	430	2,920	2022	2016	30
공룡이 지나간 길	3,375	2,750	100	525	-	2022	2017	30
벽방산 관광 자원 개발	2,890	1,092	-	1,798	-	2022	2017	40
상족암군립공원 산림레포츠 시설 조성사업	3,600	400	600	-	2,600	2023	2018	10
고성 해양레포츠 아마데미 건립사업	18,000	3,000	5,000	5,000	5,000	2021	2017	10
고성군 야구장 조성사업	8,500	3,150	1,750	3,600	-	2021	2017	30
스마트양식 클러스터 조성	40,000	4,000	19,000	9,000	8,000	2022	2019	25
동문항 어촌뉴딜 300사업	9,429	-	2,449	3,772	3,208	2022	2019	20
당항항 어촌뉴딜 300사업	9,568	-	2,484	3,827	3,257	2022	2019	20
당동항 어촌뉴딜 300사업	9,568	-	2,484	3,827	3,257	2022	2019	20
입암제전항 어촌뉴딜 300사업	13,104	4,586	5,898	2,620	-	2021	2019	30
가리비 수산물축제	381	-	120	259.5	259.5	2023	2018	100

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
갈모봉 자연휴양림 조성사업	5,000	206.3	93.7	3,110	1,590	2023	2018	20
고성읍 서부권 생활SOC복합화사업	16200	6,400	27	773	9,000	2023	2020	10
남산공원 일몰제 적극 대응	60,134	55,351	1,052	731	3,000	2026	2018	83.4
거류산둘레길 조성사업	4,536	3,630	806	100(이월)	-	2020(이월)	2014	90
LNG벙커링 핵심기자재 지원 기반구축사업	31,935	14,187	6,690	6,653	4,405	2022	2017	80
이당일반산업 단지조성사업	30,291	17,036	6,705	6,550	-	2022	2019	80
공룡시장 주차 환경 개선사업	3,350	-	1,417	1,933	-	2021	2019	90
무인항공기 통합시험 훈련기반 구축사업	18,700	4,000	5,400	3,900	5,400	2023	2019	30
화물자동차 공영차고지 조성사업	4,715	2,488	708	1,519	-	2021	2017	40
DS2차아파트 주변도로 (소로2-16호)개설	3,080	330	855	-	1,895	2023	2018	20
고성읍공영 주차장 조성사업	4,000	1,776	830	1,394	-	2021	2018	40
송학광장~제일교회간 도로 (소로1-5호)개설	2,230	1,630	240	360	-	2021	2019	84
버스터미널~기월사거리간 도로 (중로1-10호)개설공사	10,900	4,150	1,500	2,300	2,950	2022	2016	45
공룡시장~남산공원간 도로(2-23호)개설공사	2,600	2,250	350	-	-	2020	2017	100
고성향교~남외마을간 도로(소로1-7호) 개설공사	2,500	130	520	700	1,150	2023	2016	20
고성여중~구농어촌공사간 도로(소로2-12호) 개설공사	3,330	1,230	400	100	1,600	2023	2018	30
대성초교~고성초교간 도로(소로2-19호) 개설공사	2,300	1,600	300	400	-	2021	2020	50

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
고성군 행복주택 건립사업	19,268	1,850	1,662	15,756	-	2020	2017	100
고성군 마을정비형 공공주택 건립사업	13,900	1,950	4,250	2,500	5,200	2021	2017	63
공공실버주택 건립사업	15,809	15,809	5,452	-	-	2020	2017	100
먹거리통합지원센터 건립	3,084	21	563	2,500	-	2021	2019	30
스마트축산ICT 시범단지 조성사업	65,369	200	22	1,755	63,392	2023	2020	10
농산물가공 지원센터 건립	2,024	-	36	1,988	-	2021	2020	5
디노 AR·VR 체험존 조성사업	3,000	1,800	1,800	1,200	-	2021	2019	93
국민여가 캠핑장 조성사업	4,073	3,482	591	-	-	2020	2016	100

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 청소년수련관 건립

담당자

교육청소년과 윤지성(☎670-4662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년의 여가활동ㆍ문화체험ㆍ자치활동의 중심적 역할 수행

○ 다양한 활동프로그램 운영으로 청소년 만남의 장과 정보교류 마당 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 경남 고성군 고성읍 성내로61

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층(연면적 2,979㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,680	4,417	3,680	583
국 비	4,586	3,268	1,318
시 도 비	2,039		1,456	583
시군구비	2,055	1,149	906
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2018. 12.: 공사계약 심사 및 보완, 입찰공고, 계약

○ 2019.  1.: 문화재 정밀발굴조사 완료, 착공

○ 2019.  1.: 건축·전기·소방·통신 공사 착공

○ 2020.  8.: 건축물 준공

□ 향후계획

○ 2021.  1.: 증축 및 추가공사 착공

○ 2021.  7.: 내부 추가공사 착공

○ 2021.  8.: 준공(완료)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 작은영화관 건립사업

담당자

교육청소년과 백수연(☎670-4665)

□ 사업목적 및 필요성

○ 작은영화관을 건립하여 인근 도시지역 원정 영화관람으로 발생하는 불편 및 경제적 손실을 해소하고 부족한 문화공간 확충으로 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1 ~ 2020. 6

○ 위 치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 58(구 농업기술센터 부지)

○ 규 모 : 지상2층(부지면적 3,018㎡, 건축연면적 656㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,383백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,383	97	3,286
국 비	1,000	29	971
시 도 비	300	8	292
시군구비	2,083	60	2,023
특 교
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 4.: 작은영화관 건립 계획서 제출(군 → 경상남도)

○ 2018. 1.: 작은영화관 건립공사 추진계획 확정 방침 결재

- (사업비) 20억원(지특 10억원, 도비 3억원, 군비 7억원)

○ 2018. 3.: 작은영화관 기본 및 실시설계 용역 시행

○ 2019. 3.: 지방재정투자심사 재심사(도심사) 완료

2019년 제1회 추경예산 부족 사업비 추가 확보

- (사업비) 군비 13.8억원 증액(총사업비 20억 → 33.83억원)

○ 2019. 8.: 작은영화관 건립공사 착공

○ 2019.10.: 주차면수 추가 확보를 위한 작은영화관 실시설계변경

- 주차면수 당초 19대 → 변경 44대

○ 2020. 6.: 작은영화관 건립공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비: 당초 20억원 → 변경 33.8.억원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

간사지 갈대습지 생태공원 조성사업

담당자

문화관광과 한찬기(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 간사지는 마동호를 따라 이어진 갈대군락과 희귀한 철새들의 보금자리로

생태자연과 관광·문화가 어우러지는 생태공원으로 조성할 필요가 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)

○ 위 치 : 고성군 마암면 삼락리 428-2번지 일원

○ 규 모 : 순환체험로(주탐방로 2.0㎞, 보조탐방로 1.8㎞), 주차장

갈대정원, 둠벙 및 논체험장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,040	40	600	1,400	3,000
국 비	2,000			500	1,500
시 도 비	600			150	450
시군구비	2,440	40	600	750	1,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 4.: 2020년 제1차 투자심사 완료(적정)

○ 2020. 6.: 고성군 공유재산 심의 완료

○ 2020. 7.: 사업 타당성 및 기본계획 수립용역 완료

○ 2020.12.: 조사측량 및 실시설계용역(1차분) 착수

□ 향후계획

○ 2021. 2.: 조사측량 및 실시설계용역(2차분) 착수

○ 2021. 7.: 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업 계약심사 의뢰

○ 2021. 7.: 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(1차분) 착공

○ 2024.12.: 탐방로 조성, 주차장 조성 등 전체사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성 해양치유센터 건립사업

담당자

문화관광과 한찬기(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해안 대표 해양치유자원을 활용한 고성군 해양치유센터 건립으로 새로운       고부가가치 관광산업 및 일자리 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)

○ 위 치 : 고성군 하일면 송천리 108번지 일원

○ 규 모 : 해양치유센터 2동(지하1층/지상2층, 연면적 5,924㎡)

- 해양치유센터: 해양치유시설, 운영·관리시설 등

- 롱텀케어센터(장기치유): R&D실증연구센터, 자원관리센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	35,400	400	1,400	3,000	30,600
국 비	17,500		1,000	2,000	14,500
시 도 비	5,300		300	200	4,800
시군구비	12,600	400	100	800	11,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 4.: 공공건축 사업계획 사전검토서 제출(건축도시공간연구소)

○ 2020. 4.: 2020년 제2차 정기 지방재정 투자심사 의뢰(행정안전부)

○ 2020. 6.: 지역 관광자원개발 투자유치 상품성강화 컨설팅 선정(한국관광공사)

○ 2020. 7.: 2020년 제2차 정기 지방재정 투자심사 완료(조건부)

○ 2020. 9.: 설계공모 방식에 따른 사업추진(조달청 맞춤형서비스)의뢰

□ 향후계획

○ 2021. 2.: 해양치유센터 건립사업 공공건축 심의회 개최(조달청)

○ 2021. 3.: 자란도 해양치유센터 진입도로 실시설계용역 시행

○ 2021. 6.: 해양치유센터 건립 공공건축 실시설계용역 착수

○ 2022. 1.: 해양치유센터 건립공사 착수 및 추진 예정

○ 2023.12.: 전체사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 향토역사관 건립

담당자

문화관광과 김구희(☎670-2203)

□ 사업목적 및 필요성

○ 故 제정구 선생의 유업과 청빈 사상 계승 및 자라나는 청소년들에게

나눔의 정신을 고취하고 관광자원화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 7. ~ 2021. 1.

○ 위 치 : 경남 고성군 대가면 유흥리 304(대가공원 내)

○ 규 모 : 지상 1층(건축연면적 449.38㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,520	122	2,111	287
국 비
시 도 비
시군구비	2,520	122	2,111	287
특 교
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 88%)

○ 2018. 7.: 사업비 일부 확보(2018년 1회추경 군비 1,000백만 원)

○ 2018.10.: 기본계획 용역 시행

○ 2018.12.: 사업비 잔액 확보(2019 당초예산 군비 800백만 원)

○ 2019. 1.: 실시설계 용역 시행

○ 2019.10.: 지방재정투자심사(자체심사) 완료

○ 2019.12.: 2020년 당초예산 부족 사업비 추가 확보

- (사업비) 군비 7.2억원 증액(총사업비 18억 → 25.2억원)

○ 2019. 12: 향토역사관 시설공사 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2021.  1: 향토역사관 건립공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비: 당초 18억원 → 변경 25.2.억원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당항만 둘레길 탐방로 설치사업

담당자

문화관광과 최재우(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이순신 장군이 대승을 거둔 당항포대첩 승전지의 아름다운 자연경관과 해안

습지 생태계를 지역특성에 맞는 새로운 관광콘텐츠 개발로 관광 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.

○ 위 치 : 경남 고성군 회화면 당항리 일원

○ 규 모 : 해안탐방로 L=1.98km, B=2.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,900	669	2,976	255
국 비	2,100	311	1,604	185
시 도 비	270		270
시군구비	630		609	21
특 교	900	358	493	49
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  2.: 지방재정 투·융자 심사 완료(적정)

○ 2018. 10.: 당항만 둘레길 해안탐방로 조성사업 착공

○ 2019. 12.: 경관조명 설치사업 착공

○ 2020. 12.: 당항만 둘레길 탐방로 조성사업 전체 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 사유지 매수사업

담당자

문화관광과 김현오(☎670-2545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 내 일부 사유지 소유자의 재산권 제한으로 불만 야기, 국비            지원사업으로 추진될 수 있도록 공원 내 사유지 매수 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2038.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리, 월흥리 일원

○ 규 모 : 육지부 사유지 605필지 748,046㎡(육지부 공원면적의 56%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	34,000	1,000	100	100	32,800
국 비
시 도 비
시군구비	34,000	1,000	100	100	32,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018.  8.: 상족암군립공원 사유지 매수 계획(안) 방침 결재

○ 2018.  8.: 토지매수 사업비 확보

○ 2018. 11.: 2018년 사업비 집행(11필지 5,043㎡)

○ 2019.  1.: 토지매수 사업비 확보

○ 2019.  9.: 2019년 사업비 집행(5필지 16,904㎡)

○ 2020.  1.: 토지매수 사업비 확보

○ 2020.  9.: 2020년 사업비 집행

□ 향후계획

○ 2021. ~ 2038.: 매년 예산을 확보하여 사유지 확보 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업

담당자

문화관광과 한찬기(☎670-2543)

역점사업추진단 박성진(☎670-5904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 교통인프라 확충을 통한 관광객 방문편의 제공 및 주변              지역 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리, 월흥리 일원

○ 규 모 : 주차장 2개소 51,529㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,560	1,110	100	430	2,920
국 비	4,300	850	100	430	2,920
시 도 비
시군구비	260	260
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 12.: 경상남도 발전촉진형‧거점육성형 지역개발계획 고시

○ 2018. 12.: 지역개발사업구역지정을 위한 제안서 제출(군→도)

○ 2019.  3.: 지역개발조정위원회 개최(경상남도)

○ 2019.  9.: 지역개발계획 중대한 변경 신청

○ 2019. 12.: 공원계획 변경 관련 공원계획위원회 심의

□ 향후계획

○ 2023.12.: 전체사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업명 : 상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업

○ 총사업비 : 당초 3,700백만원 → 변경 4,560백만원 (증가율 23%)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공룡이 지나간 길 조성사업

담당자

문화관광과 한찬기(☎670-2543)

역점사업추진단 박성진(☎670-5904)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공룡탐방로와 연계한 기반인프라 정비·확충으로 이용성을 강화하고 체류형       관광으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리, 월흥리 일원

○ 규 모 : 야영장겸용 주차장 A=17,437㎡, 탐방로 L=1.5㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,375	2,750	100	525
국 비	1,425	800	100	525
시 도 비
시군구비	1,950	1,950
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○2017. 02. : 지방재정투자심사 완료(자체)

○2017. 08. : 2017년 지역수요 맞춤지원 공모사업 선정

○2019. 12. : 공룡이 지나간 길 조성사업 착공

□ 향후계획

○2022. 12: 전체 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 2,800백만원 → 변경 3,375백만원 (증가율 20%)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

벽방산 관광자원 개발

담당자

문화관광과 최재우(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벽방산 관광자원을 활용하여 테마형 관광개발로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 경남 고성군 거류면 은월리 일원

○ 규 모 : 주차장, 진입도로, 주민 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,890	1,092		1,798
국 비	1,074	100		974
시 도 비	322	30		292
시군구비	1,494	962		532
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017.  2.: 지방재정투자심사 완료(적정)

○ 2019.  6.: 벽방산 관광자원화 개발 주차장 공사 착공 및 준공

○ 2020.  5.: 벽방산 관광자원화 개발 진입도로 개설공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 11.: 벽방산 관광자원화 개발 진입도로 개설공사 준공

○ 2022. 12.: 벽방산 관광자원화 사업 전체 준공

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 당 초: 주차장, 진입도로, 숲길안내센터, 특산물판매장, 어린이 놀이터 등

변 경: 주차장, 진입도로, 기타 편의시설 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 산림레포츠 시설 조성사업

담당자

문화관광과 한찬기(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 산림자원을 이용한 모험 및 체험시설을 조성하여 상족암       문화자원과 연계한 이용성 증대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 산31번지 일원

○ 규 모 : 레일모험시설 L=600m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600	400	600		2,600
국 비	200	200
시 도 비	2,140	60	390		1,690
시군구비	1,260	140	210		910
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018.  3.: 2018년도 제1차 자체 투자심사 완료(적정)

○ 2019.  7.: 산림레포츠시설 조성사업 사업계획변경 검토 보고

○ 2019. 12.: 공원계획 변경 관련 공원계획위원회 심의

□ 향후계획

○ 2020.  9.: 기본 및 실시설계 완료

○ 2021. ~ 2023.: 사업 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 당 초: 산림어드벤처시설 4코스 A=6,500㎡, 체험장 진입로 L=1.7㎞, 홍보         및 관리시설 1동(A=510㎡), 트리하우스 3동 등

변 경: 레일모험시설 L=600m

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성해양레포츠 아카데미 건립사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎670-4724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최고의 다기능 해양레포츠 전문교육 시설 건립 추진

○ 체계적이고 효율적인 해양레포츠 전문 인력 양성 시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2021

○ 위 치 : 고성군 회화면 봉동리 950-7번지

○ 규 모 : 교육·훈련동(수영장, 잠수 풀) 및 생활동(숙소) 건립(지상2층/4,049.09㎡), 해상계류장 설치(50척 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000	3,000	5,000	5,000	5,000
국 비	4,000	1,500	2,500
시 도 비	7,700	450	750	3,250	3,250
시군구비	6,300	1,050	1,750	1,750	1,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2013.  1.: 대통령 공략사업 선정

○ 2015.  5.: 사업예정지 변경 협의(통영시→고성군)

○ 2017.  6.: 지방재정 중앙투자심사 통과

○ 2019.  1.: 기본 및 실시설계 공모 실시

○ 2019.  4.: 설계 공모 완료 및 실시설계 용역 착수

○ 2020.  1.: 경상남도 지방건설기술심의회 심의

○ 2020.  4.: 경남도 계약심사 완료

□ 향후계획

○ 2020.  7.: 공사 계약 및 착공

○ 2021. 11.: 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 야구장 조성사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎670-5844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 체육시설과 연계한 체육 인프라 구축을 통한 체육활동 증대

○ 전지훈련팀 유치로 지역경제 부가가치 창출 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 기월리 83-6번지 일원

○ 규 모 : 야구장 조성 1면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,500	3,150	1,750	3,600
국 비	2,000	300	700	1,000
시 도 비
시군구비	6,500	2,850	1,050	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 9. ~ 2020. 9.: 사전 행정절차 및 편입토지 보상협의 완료

○ 2019. 4. ~ 2020. 7.: 실시설계 용역 착수 및 완료

○ 2020.10.: 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021.12.: 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 당초 77억원 → 변경 85억원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스마트양식 클러스터 조성

담당자

해양수산과 손치민(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발전소 회처리장 및 온배수 활용을 통한 스마트양식 전진 기지 구축

○ 유휴자원 활용으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 경남 고성군 하이면 덕호리 810-5 일원

○ 규 모 : 2개사업

- 테스트베드(시험·실증센터 16,000㎡)

- 배후부지(기반조성 84,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	40,000	4,000	19,000	9,000	8,000
국 비	22,000	2200	11300	4,500	4,000
시 도 비	5,400	540	2310	1,350	1,200
시군구비	6,600	660	3390	1,350	1,200
지 방 채
민간자본	6,000	600	2000	1,800	1,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ '19.  8. 23. : 정부 공모사업 선정

○ '19. 11. 28. : 고성군‧(주)AQA‧한국농어촌공사 위‧수탁협약 체결

○ '20.  5.  6. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수

○ '20.  5. 12. : 사업단 ･ 자문위원 회의 및 용역 착수보고회

○ '20.  6. ~  : 배후부지 사전 수요조사 추진

□ 향후계획

○ '21.  1. 15. : 기본계획 해양수산부 승인

○ '21.  6. 15. : RAS 기본설계 용역 발주

○ '21.  6. 21. : 테스트베드 및 배후부지 실시설계용역 착수

○ '21.  7.  7. : 실시설계용역 착수보고회

○ ‘21. 11. : 실시설계 용역 준공

○ ’22.  7. :사업 완료(배후부지: '21. 12, 테스트베드: '22. 6.)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동문항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화 도모

○ 어촌주민의 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022

○ 위 치 : 고성군 하일면 동화리(동문항)

○ 규 모 : 어촌뉴딜300사업 1개소(공통사업, 특화사업, S/W사업, 기타사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,429백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,429		2,249	3,772	3,208
국 비	6,600		1,714	2,640	2,246
시 도 비	849		221	340	288
시군구비	1,980		514	792	674
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘20년 동문항 어촌뉴딜300 공모 선정: ‘19. 12. 15.

○ 사업대상지 기본계획 및 역량강화 교육 용역 착수: ‘20. 5. ~

○ 기본계획 승인 신청: ‘20. 8. 31.

○ 기본계획 심의: ‘20. 10. 19.

○ 기본계획 수립 고시: ‘20. 12. 17.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 각종 인허가 사항 완료: ‘21. 7.

○ 공사 발주: ‘21. 7. / 공사 준공: ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당항항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화 도모

○ 어촌주민의 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 회화면 당항리(당항항)

○ 규 모 : 어촌뉴딜300사업 1개소(공통사업, 특화사업, S/W사업, 기타사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,568백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,568		2,484	3,827	3,257
국 비	6,698		1,739	2,679	2,280
시 도 비	861		224	344	293
시군구비	2,009		521	804	684
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘20년 당항항 어촌뉴딜300 공모 선정: ‘19. 12. 15.

○ 사업대상지 기본계획 및 역량강화 교육 용역 착수: ‘20. 5. ~

○ 기본계획 승인 신청: ‘20. 8. 31.

○ 기본계획 심의: ‘20. 10. 19.

○ 기본계획 수립 고시: ‘20. 12. 17.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 각종 인허가 사항 완료: ‘21. 7.

○ 공사 발주: ‘21. 7. / 공사 준공: ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당동항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화 도모

○ 어촌주민의 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 거류면 당동리(당동항)

○ 규 모 : 어촌뉴딜300사업 1개소(공통사업, 특화사업, S/W사업, 기타사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,568백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,568		2,484	3,827	3,257
국 비	6,698		1,739	2,679	2,280
시 도 비	861		224	344	293
시군구비	2,009		521	804	684
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘20년 당동항 어촌뉴딜300 공모 선정: ‘19. 12. 15.

○ 사업대상지 기본계획 및 역량강화 교육 용역 착수: ‘20. 5. ~

○ 기본계획 승인 신청: ‘20. 8. 31.

○ 기본계획 심의: ‘20. 10. 19.

○ 기본계획 수립 고시: ‘20. 12. 17.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 각종 인허가 사항 완료: ‘21. 7.

○ 공사 발주: ‘21. 7. / 공사 준공: ‘22. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

입암제전항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 손치민(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양관광 및 어촌경제 활성화 도모

○ 어촌주민의 삶의 질 제고 및 지역 균형발전 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.

○ 위 치 : 고성군 하이면 월흥리·덕명리(입암·제전항)

○ 규 모 : 어촌뉴딜300사업 1개소(공통사업, 특화사업, S/W사업, 기타사업)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,104백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2021년	2022년 이후
계	13,104	4,586	5,898	2,620
국 비	9,172.8	3210	4128	1834.8
시 도 비	1,179.4	413	531	235.4
시군구비	2,751.8	963	1239	549.8
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ '18. 12. 19. : '19년 공모사업 선정(입암·제전항 131억 원)

○ '19.  3. 15. : 업무위수탁 협약체결(한국어촌어항공단)

○ '19.  5.  9. : 기본계획 및 실시설계용역 착수

○ '19. 12. 13. : 입암·제전항 사업계획 수립 고시

○ '19. 12. 27. : 지역역량강화사업 착수

○ '20.  3. 12. : 문화재 현상변경 관련 문화재청 협의

○ '20.  6. ~ '21.  1. : 접안시설 정비공사 착공 / 준공

□ 향후계획

○ '21.  4. 30. : 시행계획 고시

○ '21.  7. 16. : 토목공사 입찰 공고

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

가리비 수산물 축제

담당자

해양수산과 김동욱(☎670-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고성 가리비의 판매 촉진과 소비층 확대로 어업소득 향상을 위한 계기 마련

○ 축제를 통한 고성 가리비가 지역대표 수산물 특화 브랜드로 각인

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. (계속사업)

○ 위 치 : 경남 고성군 고성종합운동장 일원(축제 추진위원회 협의 후 최종 결정)

○ 규 모 : 축제1식(공식행사, 공연행사, 판매행사, 홍보행사, 특별행사 등)

- 공식, 공연·온오프라인 판매 및 시식·전시·참여 행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 639 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	639		120	259.5	259.5
국 비	50		0	25	25
시 도 비	144		40	52	52
시군구비	265		40	112.5	112.5
지 방 채
민간자본	180		40	70	70
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ '21. 7. : 축제 기본 계획(안) 수립 및 확정

○ '21. 7. : 기본계획 확정을 위한 가리비 생산자 간담회 개최

□ 향후계획

○ '21. 8. : 제5회 고성 가리비 수산물축제 종합실행계획 수립

○ '21. 8. : 행사 대행업체 계약 및 프로그램 출연 단체 섭외 등

○ '21. 9. : 축제 추진위원회 개최(프로그램 확정 등 심의)

○ '21. 9. : 축제 안전관리계획 및 추진상황보고회 개최

○ '21. 10.: 축제장 기본시설 설치 및 개최

○ '21. 11.: 축제 종료 후 평가위원회(결산보고회) 개최

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

갈모봉 자연휴양림 조성사업

담당자

녹지공원과 신다예(☎670-2673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 산림자원 및 자연환경을 종합적으로 체험할 수 있는 자연       휴양림을 조성하여 질 높은 산림복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 1. ~ 2022. 12.(4년간)

○ 위 치 : 경남 고성군 고성읍 이당리 산146-1번지 일원

○ 규 모 : 방문자센터, 숲속의집, 숲속도서관, 특산물판매장 등(619,829㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	206.306	93.694	3,110	1,590
국 비	2,500	103.153	46.847	1,555	795
시 도 비	750	30.946	14.054	466.5	238
시군구비	1,750	72.207	32.793	1,088.5	557
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 6.: 자연휴양림 지정고시(산림청)

○ 2019. 4. ~ 2020.10.: 자연휴양림 기본계획 및 실시설계

○ 2021. 3.: 국유림 산지전용신고 및 사용허가

○ 2021. 5.: 자연휴양림 조성계획 승인(경남도)

□ 향후계획

○ 2021. 7. ~ 2023. 4.: 자연휴양림 조성사업 시행

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성읍 서부권 생활SOC복합화사업

담당자

녹지공원과과 임경신(☎670-2663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그동안 방치되어 온 구)공설운동장을 활용하여 어린이도서관, 주거지주차장,       공원을 조성으로 군민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 교사리 53번지 일원

○ 규 모 : 18810㎡

- 어린이도서관 연면적:1,700㎡,지하1층 지상2층

- 주거지주차장: 1,100㎡

- 공원: 16,510㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	16,200	6,400	27	773	9,000
국 비	2900			300	2600
시 도 비
시군구비	13300	6,400	27	473	6400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 20. 09.: 지방재정투자심사 완료

○ 20. 11. ~ : 기본계획 수립용역

□ 향후계획

○ 21. 07.: 기본계획 수립완료

○ 21. 08.: 설계공모

○ 21. 11.: 설계용역 착수

○ 22. 02.: 공사 착공

○ 23. 06.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

해당사항없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남산공원 일몰제 적극 대응

담당자

녹지공원과 장배석(☎670-2664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남산공원 유지를 위한 일몰제(실효) 대응하기 위하여 사유지 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : ~ 2026(계속사업)

○ 위 치 : 고성읍 동외리 366번지 일원

○ 규 모 : A=798,465㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 60,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	60,134	55,351	1,052	731	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	60,134	55,351	1,052	731	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83.4%)

○ 편입토지 보상협의(665,989㎡/798,465㎡)

○ 토지 감정평가

○ 토지 등기이전 및 보상

※ 공원내 토지보상 사업으로서 계속적인 반복

□ 향후계획

○ 남산공원 잔여 사유지 매입(132,476㎡)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

거류산둘레길 조성사업

담당자

녹지공원과 신다예(☎670-2673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 거류산 절경과 산성 연계 역사와 문화가 있는 둘레길 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2015~2019(5년간)

○ 위 치: 고성군 거류면 거류산 일원

○ 규 모: 둘레길 조성 1식(L=40km, B=2.0km), 주차장 및 편의시설, 조망·휴식공간 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,536백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,536	3,630	806	100
국 비	770	770
시 도 비	1,394	941	403	50
시군구비	2,372	1,919	403	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2015. 6.: 부지매입 완료(5필지, 6,350㎡)

○ 2016. 1.: 거류산둘레길 기본 및 실시설계

○ 2016.11.: 거류산둘레길 조성사업 착공

○ 2017. 1.: 도 문화재(거류산성) 현상변경 허가

○ 2020. 8.: 거류산둘레길 조성사업 준공

□ 향후계획

○ 2020. 7~8.: 2020 거류산둘레길 조성사업(100백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

LNG벙커링 핵심기자재지원 기반구축사업

담당자

일자리경제과 서진식(☎670-2313)

□ 사업목적 및 필요성

○ LNG벙커링 신규 시장 선점을 위한 핵심기자재 개발 및 설계역량 확보 필요

○ 개발된 기자재의 국제 경쟁력을 확보를 위한 성능 시험 지원 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

○ 위 치 : 고성군 동해면 용정리 158번지 일원

○ 규 모 : 27,308㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	31,935	14,187	6,690	6,653	4,405
국 비	10,000	4,522	2,000	2,863	615
시 도 비	11,200	2,000	3,600	2,800	2,800
시군구비	10,300	7,500	1,000	900	900
지 방 채
민간자본	435	165	90	90	90
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017. 4.: 산업부 2018년 지역산업거점기관지원 대상사업 확정

○ 2018. 5.: 경남도·한국기술진흥원·경남TP·고성군 전자협약 체결

○ 2018. 8.: 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역 시행

○ 2019. 5.: 부지조성사업 착공

○ 2020. 2.: 시험인증센터 건축 착공

○ 2020. 6.: 부지조성사업 완공

□ 향후계획

○ 2021. 6.: 시험인증센터 사업 완공

○ 2021.12.: 극저온 기자재 단품 및 시스템 시험인증체계 구축

○ 2022.12.: LNG벙커링 핵심기자재 기반구축사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이당일반산업단지 조성사업

담당자

일자리경제과 김윤석(☎670-2344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특정 산업 의존도 완화를 위해 고성군 차기 산업인 항공산업

관련 부품전문 업체 유치 및 투자촉진

○ 항공산업 기업유치를 통한 고성군 장기 지속발전 가능한 경제구조 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.(5년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 교사리 891-13번지 일원

○ 규 모 : 산업단지 조성 131,270㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,291백만원(도비 700, 군비 29,591)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,291	17,036	6,705	6,550
국 비
시 도 비	700		300	400
시군구비	29,591	17,036	6,405	6,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2019.  9.: 산업단지계획심의위원회 심의

○ 2019.  9.: 산업단지계획 승인 및 고시

○ 2019. 10.: 산업단지 및 KAI 공장건립 착공

○ 2020.  6.: 산단진입도로 도로공사 시행허가 신청

○ 2020.  8.: 산업단지계획(변경)

○ 2020. 10.: KAI 공장건립 준공

□ 향후계획

○ 2022. 10.: 산업단지 개발사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공룡시장 주차환경 개선사업

담당자

일자리경제과 박현미(☎670-2303)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 시설물 노후로 인한 방문고객 불편을 해소하고, 시장 방문객

안전확보 및 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 5.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 일원

○ 규 모 : 주차 63면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,350백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,350		1,417	1,933
국 비	2,010		850	1,160
시 도 비
시군구비	1,340		567	773
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2019. 9. ~ : 공룡시장 주차환경개선사업 편입부지 보상

○ 2020. 5. : 공룡시장 주차환경개선사업 사업변경 승인(사업부지 추가)

○ 2020. 7. : 공룡시장 주차환경개선사업(1차) 실시

○ 2020. 11.: 공룡시장 주차환경개선사업(2차) 실시

○ 2020. 12.: 문화재 정밀조사 용역 실시

□ 사업변경 내역

○ 당초

- 사업규모 : 839㎡(고성군 고성읍 성내리 203 외 2필지)

○ 변경(최종)

- 사업규모 : 1,334㎡

(당초 사업대상지 + 고성군 고성읍 성내리 212-2 외 4필지 추가)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

무인항공기 통합시험 및 훈련기반 구축사업

담당자

일자리경제과 임금아(☎670-2345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부 혁신성장 8대 선도사업인 무인기 산업 발전을 위한 기본 인프라 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.(5년간)

○ 위 치 : 고성군 동해면 내곡리(무인기종합타운 내)

○ 규 모 : 건축면적 1,816㎡, 연면적 2,451㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,700백만원                               (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,700	4,000	5,400	3,900	5,400
국 비	12,400	4,000	2,000	1,000	5,400
시 도 비	4,000		3,400	600
시군구비	2,300			2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 8.: 무인기 통합시험□훈련기반 구축사업 선정(국무회의 의결)

○ 2019. 8.: 무인기 통합시험시설 장비구축 용역 발주(국토교통부)

□ 향후계획

○ 2021. 5.: 건축공사 착공

○ 2022. 5.: 건축공사 준공

○ 2022. 5. ~ 2023. 12.: 통합시험□훈련기반 장비 구축

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

도시교통과 이정란(☎670-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 공영차고지를 조성하여 주택가 이면도로 밤샘주차로 인한         소음 발생 및 각종 사고 위험 등의 주민불편 해소

○ 화물자동차 운전자를 위한 편의시설 제공 및 산업물류수송 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2021.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 율대리 193번지 일원

○ 규 모 : 면적 19,866㎡(주차면 144면, 관리동 및 휴게동 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,715백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,715	2,488	708	1,519
국 비	1,761	1,384	377
시 도 비	1,287	237	110	940
시군구비	1,667	867	221	579
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2016. 12. : 화물차 공영 차고지 건립 타당성 조사 실시

○ 2017. 12. : 고성군계획시설(주차장: 화물자동차) 결정 용역 발주

○ 2019. 11. : 편입토지 보상 및 실시설계용역 시행

○ 2019. 12. : 군계획시설 결정 및 고시

○ 2020.  3. : 지질조사 용역 준공

○ 2020.  6. : 고성군 화물자동차 공영차고지 조성사업 발주

○ 2020.  9. : 소규모환경영향 및 재해영향평가 완료

○ 2020.  9. : 실시계획 인가고시 및 토목공사(1차분) 착공

○ 2020.  9. : 농업진흥구역 해제고시

□ 향후계획

○ 2021.  4. : 토목공사 2차분 착공

○ 2021.  6. : 전기. 통신공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

DS2차아파트 주변도로 (소로2-16 호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023.(7년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=324.0m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,080	330	855		1,895
국 비
시 도 비
시군구비	3,080	330	855		1,895
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2018. 7. : 2018년 2차 투융자심사 승인(적정)

□ 향후계획

○ 2021. 1. ~ : 보상협의 추진 계속

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성읍 공영주차장 조성사업

담당자

도시교통과 이정란(☎670-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고성읍 시가지내 공영주차장을 조성하여 주차난 해소 및 원활한 교통 소통과       지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2021.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 19번지 일원

○ 규 모 : 면적 1,865㎡(주차면 62면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	1,776	830	1,394
국 비	2,000	888	415	697
시 도 비
시군구비	2,000	888	415	697
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 6. : 토지 손실보상 협의

○ 2019.12. : 주차장 조성공사 실시설계 용역

○ 2020. 6. : 지장물 철거

○ 2020. 8. : 지질조사 용역

○ 2020. 9. : 임시주차장 운영

□ 향후계획

○ 2021. 5. : 고성읍 공영주차장 준공

○ 2021. 6. : 추가부지 매입

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

송학광장~제일교회간 도로(소로1-5호) 개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2021.(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 서외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=160.0m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,230	1,630	240	360
국 비
시 도 비	200		60	140
시군구비	2,030	1,630	180	220
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ 2019. 11. : 2019년 3차 투융자심사 승인(적정)

○ 2020. 5. : 사업 착공

□ 향후계획

○ 2021. 4. : 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

버스터미널~기월사거리간 도로

(중로1-10호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022년(6년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 송학리, 기월리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=673m, B=24.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,900백만원/

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,900	4,150	1,500	2,300	2,950
국 비
시 도 비
시군구비	10,900	4,150	1,500	2,300	2,950
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 8. : 실시설계 완료

○ 2017. 5. ~ : 보상협의 추진

○ 2020. 6. : 공사 착공

○ 2021. 6. : 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 2차분 공사 추진

○ 2022. 1. : 잔여분 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 (11,600백만원 ⇒ 10,900백만원) : 보상금액 및 사업량 변경

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공룡시장~남산공원간 도로

(소로2-23호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2020년(6년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 동외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=220m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,600	2,250	350
국 비
시 도 비	190	190
시군구비	2,410	2,060	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 5. : 실시설계 완료

○ 2016. 1. ~ : 보상협의 추진

○ 2019. 1. : 공사 착공

○ 2020. 11. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성향교~남외마을간 도로

(소로1-7호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2023년(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 서외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=875m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	130	520	700	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	130	520	700	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017. 1. : 실시설계 완료

○ 2019. 1. ~ : 보상협의 추진

□ 향후계획

○ 2021. 7. ~ : 보상협의 추진 계속

○ 2022. 1. ~ : 1구간 사업착공 예정

□ 사업변경 내역

○ -

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성여중~구농어촌공사간 도로

(소로2-12호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2023년(7년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=392m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,330	1,230	400	100	1,600
국 비
시 도 비
시군구비	3,330	1,230	400	100	1,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 1. : 실시설계 완료

○ 2018. 1. ~ : 보상협의 추진

□ 향후계획

○ 2022. 6. ~ : 공사 착공 예정

○ 2023. 12. ~ : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ -

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대성초교~고성초교간 도로

(소로2-19호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015~2021년(7년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=146m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300	1,600	300	400
국 비
시 도 비	200		200
시군구비	2,100	1,600	100	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015. 5. : 실시설계 완료

○ 2016. 1. ~ : 보상협의 추진

○ 2020. 5. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 6. : 문화재발굴(정밀) 조사 완료

○ 2021. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 행복주택 건립사업

담당자

건축개발과 고주성(☎670-2273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신혼부부, 사회초년생, 대학생 등 주거취약계층의 주거안정을 위한 저렵한 공공주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2020.

○ 위 치 : 고성읍 서외리 228번지 일원

○ 규 모 : 임대주택 200호

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,268백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,268	1,850	1,662	15,756
국 비
시 도 비
시군구비	2,308	1,831	258	219
지 방 채
민간자본	16,960	19	1,404	15,537
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019.  4.: 행복주택건설사업 착공

○ 2019. 12.: 입주자모집

○ 2020. 12.: 행복주택사업 준공

□ 향후계획

○ 2021.  3.: 입주예정

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 당초: 16,700백만원/현재: 19,268백만원, 사업기간 당초: 2017

~2019/현재: 2017~2020

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 마을정비형 공공주택 건립사업

담당자

건축개발과 고주성(☎670-2273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을정비로 도시미관 개선으로 건전한 상생문화 장착과 사회 취약계층의 주거복지 실현을 통한 공공주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2021.

○ 위 치 : 고성읍 서외리 252-2번지 일원

○ 규 모 : 임대주택 110호(국민-60,영구-30,행복-20), 주변지역 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,900	6,200	2,500	5,200
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	500	500	1500
지 방 채
민간자본	11,400	5,700	2,000	3,700
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

○ 2018. 12.: 마을정비형 공동주택건설 사업계획 승인

○ 2019.  5.: 마을정비형 공공주택 보상

○ 2020.  4.: 마을정비형 공공주택사업 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12.: 마을정비형 공공주택사업 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 당초: 2017~2020/현재: 2017~2021

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 공공실버주택 건립사업

담당자

건축개발과 이재석(☎670-2273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 증가하고 있는 65세 이상 저소득층 홀몸노인의 공동체 회복에 필요성에 따라 주거복지시설 연계한 공공주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2020.

○ 위 치 : 고성읍 교사리 13번지 일원

○ 규 모 : 주택 100호(1층, 4~13층), 실버복지관(2~3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,809백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,809	10,357	5,452
국 비	12,154	9,857	2,297
시 도 비	500		500
시군구비	3,155	500	2,655
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019.  1.: 공공실버주택 착공

○ 2020.  5.: 입주자모집

○ 2020. 11.: 공공실버주택 준공

□ 향후계획

○ 2021.  1.: 입주

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

먹거리통합지원센터 건립

담당자

농업정책과 박재욱(☎670-4123)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 우수 농·수·축산물의 학교급식 확대로 안전한 먹거리 제공과 급식의 공공성 강화

○ 지역 농·수·축산물 조달로 지역농업 육성 및 농가소득 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 우산리 248-7 외 4필지

○ 규 모 : 먹거리통합지원센터 건립 1식(건축 연면적: 693.75㎡)

- 주요시설: 사무실, 선별포장실, 저온저장고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,084백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,084	21	563	2,500
국 비
시 도 비	1,625			1,625
시군구비	1,459	21	563	875
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020.  2.: 부지매입(563백만원)

○ 2020.  6.: 기본‧실시설계 용역 실시

○ 2020. 11.: 먹거리통합지원센터 건립 중간보고회

□ 향후계획

○ 2021.  1.: 기본‧실시설계 용역 완료

○ 2021.  4.: 공사계약 및 착공

○ 2021.  6.: 농산물 생산현황 조사

○ 2021.  8.: 참여농가 조직화

○ 2021. 12.: 공사 준공

○ 2022.  1.: 식재료 공급(배송)업체 선정

○ 2022.  3.: 운영 개시

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스마트축산 ICT 시범단지 조성사업

담당자

축산과 최대훈(☎670-4327)

□ 사업목적 및 필요성

○ ICT 기술이 적용된 스마트축산 단지 조성을 통해 최첨단 축산모델 제시

○ 냄새없는 축산환경 조성 및 가축 전염병의 과학적 관리

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 3 ~ 2023. 6

○ 위    치: 경남 고성군 거류면 감서리 산75-2번지 일원

○ 사업주체: 소가야스마트팜영농조합법인(대표 백길수)

○ 규    모: 40,000두 규모 현대화 양돈단지 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,369백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	65,369	200	22	1,755	63,392
국 비	14,792			2	14,790
시 도 비	2,682.5			0.5	2,682
시군구비	4,766.5	200	22	0.5	4,544
국비융자	33,747			1,402	32,345
민간자본	9,381			350	9,031
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020.  3.: 스마트축산 ICT 시범단지 조성 공모사업 선정(9,500백만 원)

- 국비(기금) 6,250 도비 1,625 군비 1,625

○ 2020.  4.: 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

○ 2020.  6.: 지방재정 투자심사 완료(행정안전부)

○ 2020.  9.: 지구단위계획, 전략환경영향평가 추진 업체 선정

○ 2020. 11.: 사업부지 지질조사 완료

○ 2021.  5.: 지구단위계획 구역 결정 입안제안 접수

○ 2021.  7.: 가축분뇨 공동자원화 시설 건립 공모사업 신청(11,750백만 원)

- 국비 4,700 도비 1,057.5 군비 2,467.5 융자 3,525

□ 향후계획

○ 2021. : 지구단위계획, 전략환경영향평가 추진

○ 2022. 3: 지구단위계획 및 환경영향평가 완료

○ 2022.  3. ~ 2022.  5.: 토목·건축공사 실시설계 및 인허가

○ 2022.  6. ~ 2023.  6.: 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농산물가공 지원센터 건립

담당자

식품산업과 오주호(☎670-4813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가공창업에 어려움을 겪는 농업인들에게 농산물 전문 가공시설 기반마련

○ 농산물 가공산업 활성화 및 농업의 6차 산업화 유도를 통한 농촌활력 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 우산리 250-1번지

○ 규 모 : 가공시설 1동(495㎡), 가공장비 5종 70대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,024백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,024		36	1,988
국 비
시 도 비	1,215		22	1,193
시군구비	809		14	795
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2020.  4.: 농산물가공지원센터 건립 건축기획 용역 완료

○ 2020. 10.: 농산물가공지원센터 건립 기본 실시설계 완료

○ 2020. 11.: 농산물가공지원센터 건립 환경성검토 및 인허가 용역 완료

○ 2020. 12.: 농산물가공지원센터 건립 건축공사 계약

□ 향후계획

○ 2021.  1.: 농산물가공지원센터 건립공사 착공

○ 2021.  7.: 농산물가공지원센터 건축공사 완료

○ 2021.  9.: 농산물가공지원센터 가공장비 설치 완료

○ 2021. 12.: 농산물가공지원센터 가공장비 시험운행 완료(사업 최종 완료)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

디노AR·VR체험존조성사업

담당자

관광지사업소 손미화(☎670-4503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순 관람 위주의 관광지조성으로 사계절 관광객의 상시유입에 한계가        있어 체험관광으로의 패러다임 변화필요

○ 차기 성공적인 엑스포 개최를 위하여 기존 영상관(엑스포주제관, 한반도공룡발자국화석관) 정비로 당항포관광지 내 더 많은 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 고성군 회화면 봉동리 당항포관광지내

○ 규 모 : AR·VR체험존조성 1식(AR·VR콘텐츠개발 및 전시관리모델링)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	3,000	1,800	1,000	200
국 비
시 도 비	1,500	300	1,000	200
시군구비	1,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

○ ‘18. 1. : 경남도 제2단계 지역균형발전사업 개발계획 확정

○ ’19. 3. : 2019년 예산일부확보(600백만원)

○ ‘19. 7. : 협상에 의한 계약 제안평가 및 우선협상대상자 통보

○ ‘19. 8. : 사업착공

○ ’20. 7. : 사업준공

□ 향후계획

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

국민여가 캠핑장 조성사업

담당자

상족암군립공원사업소 이선도(☎670-4463)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군립공원 캠핑장 조성으로 국민 여가활동 기여 및 지역관광 역량 강화

○ 부족한 야영장과 열악한 편의시설 확충 등 시설개선 추진 배경

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년~2020년(3년간)

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 15번지 일원

○ 규 모 : 캠핑장 A=30,687㎡(오토캠핑장 85면, 편의시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,073백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,073	3,482	591
국 비	1,325	1,325
시 도 비	398	398
시군구비	2,350	1,759	591
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 10. : 지방재정투자심사 완료(자체)

○ 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 10. : 상족암군립공원계획(공원시설 : 캠핑장) 변경 고시

○ 2017. 12. : 공원사업시행계획 결정 고시

○ 2018. 4. ~ 2020. 11. : 사업 착공 및 준공

10-2. 지방채 발행사업

우리 고성군에서 ′20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 고성군에서 ′20년에 추진한 민간투자사업 현황은 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	해당없음
BTO	해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

우리 고성군에서 ′20년에 추진한 개별 민간투자사업 현황은 해당사항 없습니다.