109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 고성군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
간사지 갈대습지 생태공원 조성사업	5,040	640	1,400	1,400	1,600	2024	2020	10
살고 싶은 섬 가꾸기 사업	3,000	-	150	850	2,000	2024	2021	5
해양웰니스 포레스트 조성사업	4,200	2,000	100	1,000	1,100	2023	2018	5
고성군 해양치유센터 건립사업	35,400	400	5,800	7,700	21,500	2025	2019	10
상족암군립공원 사유지 매수사업	34,000	1,000	100	300	32,600	2038	2019	10
상족암군립공원 관광벨트 인프라 구축사업	5,690	798	1,172	3,250	470	2022	2016	30
공룡이 지나간 길 조성사업	3,375	2,199	55	651		2022	2017	70
벽방산 관광 자원 개발	2,890	431	1,798	661		2022	2017	80
상족암군립공원 산림레포츠 시설 조성사업	3,600	600	-	-	2,600	2024	2018	80
코로나19 극복 고성군민 화합행사	150	-	150	-	-	2021	2021	100
고성 해양레포츠 아카데미 건립사업	18,000	5,539	9,436	3,025		2022	2017	80
고성군 야구장 조성사업	8,500	4,900	3,600			2021	2017	30
동해 생활체육시설 조성사업	7,500	2,100	3,000	2,400	-	2022	2017	50
고성 반다비 체육문화 센터 건립	9,700	2,800	3,900	3,000	-	2022	2019	50
종합운동장 및 스포츠타운 침수구역개보수사업	2,000	-	2,000	-	-	2022	2020	80

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
동계전지훈련스토브리그 개최 지원	210	0	210	210	210	계속사업	2020	100
전국 대학배구 연맹전	160	0	160	160	160	계속사업	2019	100%
전국 당구대회	160	0	160	160	160	계속사업	2019	100%
전국 중학교축구대회	180	0	180	180	180	계속사업	2019	100%
전국 중고 배구대회	160	0	160	160	160	계속사업	2020	100%
전국 씨름대회	170	0	170	170	170	계속사업	2020	100%
전국 핸드볼대회	130	0	130	130	130	계속사업	2020	100%
민속씨름대회	200	0	200	200	200	계속사업	2021	100%
전국카누선수권 대회	180	0	180	180	180	계속사업	2021	100%
지역특화 스포츠관광산업	1,070	0	427	500	0	계속사업	2021	100%
경남도민체육대회 참가	570	0	126	214	230	계속사업	2021	100%
스마트양식 클러스터 조성	40,000	23,000	9,000	8,000	-	2023	2019	25
동문항 어촌뉴딜 300사업	9,569	2,449	3,772	3,348	-	2024	2019	50
당항항 어촌뉴딜 300사업	9,572	2,484	3,827	3,261	-	2024	2019	50
당동항 어촌뉴딜 300사업	9,768	2,484	3,827	3,457	-	2024	2019	50

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
입암제전항 어촌뉴딜 300사업	13,104	10,484	2,620	-	-	2022	2019	95
신부항 어촌뉴딜 300사업	8,452	-	1,674	3,348	3,430	2023	2021	30
수산물 유통물류센터 건립	2,000	-	5	295	1,700	2023	2019	30
선도산림경영단지 조성사업	7,500	500	780	780	5,440	2029	2020	15
갈모봉 자연휴양림 조성사업	5,000	206	94	3,110	1,590	2023	2018	60
고성읍 서부권 생활SOC복합화사업	16,200	6,556	25	4,742	4,877	2023	2020	15%
남산공원 일몰제 적극 대응	60,134	55,351	1,052	731	3,000	2026	2018	83.4
LNG벙커링 핵심기자재 지원 기반구축사업	31,935	20,877	6,653	4,405	-	2022	2017	90%
이당일반산업 단지조성사업	30,291	23,741	6,550	-	-	2022	2019	98%
공룡시장 주차 환경 개선사업	3,350	2,376	974	-	-	2021	2019	100%
무인항공기 통합시험 훈련기반 구축사업	18,700	9,400	3,900	5,400	-	2022	2019	95%
화물자동차 공영차고지 조성사업	5,093	2,366	2,177	550	-	2021	2017	40
DS2차아파트 주변도로 (소로2-16호)개설	3,080	920	200	-	1,960	2023	2018	20
고성읍공영 주차장 조성사업	4,000	2,605	1,395	-	-	2021	2018	40

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
송학광장~제일교회간 도로 (소로1-5호)개설	2,230	1,830	600	-	-	2021	2019	100
버스터미널~기월사거리간 도로 (중로1-10호)개설공사	10,900	5,650	1,100	3,000	1,150	2023	2016	70
고성향교~남외마을간 도로(소로1-7호) 개설공사	2,900	650	700	250	1,300	2023	2016	20
고성여중~구농어촌공사간 도로(소로2-12호) 개설공사	3,330	1,330	100	200	1,700	2024	2018	30
대성초교~고성초교간 도로(소로2-19호) 개설공사	2,300	1,910	200	190	-	2022	2020	70
서외리 공영주차장 조성사업	3,500	-	719	1,581	1,200	2023	2020	60
도시재생 뉴딜사업 (송학고분군지구)	6,667	1,867	327	2,337	2,136	2023	2021	15
봉화골마을 진입도로 정비공사	4,960	911	1,349	1,600	1,100	2023	2019	40
고성군 마을정비형 공공주택 건립사업	20,392	2,300	6,235	10,857	1,000	2023	2021	30
먹거리통합지원센터 건립사업	2,944	563	2,354	27	-	2021	2019	100
스마트축산ICT 시범단지 조성사업	65,369	200	22	1,755	63,392	2023	2020	10
농산물가공지원센터 건립	2,024	36	1,567	186	-	2022	2020	88
행복교육지구 운영

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

간사지 갈대습지 생태공원 조성사업

담당자

문화관광과 오석환(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 간사지 일원에 생태공원을 조성하여 인근의 당항만 둘레길과 연계한

새로운 관광 수요 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024년(4년간)

○ 위 치 : 고성군 마암면 삼락리 428-2번지

○ 규 모 : 순환체험로(주탐방로 2.0km), 주차장, 갈대정원, 둠벙 및 논체험장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,040	640	1,400	1,400	1,600
균특전환	2,000		500	700	800
시 도 비	600		150	210	240
시군구비	2,440	640	750	490	560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘20. 4.: 2020년도 제1차 투자심사 완료(적정)

○ ‘20. 11.: 조사측량 및 실시설계 용역 시행

○ ’21. 12.: 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(1차분) 착공

□ 향후계획

○ ’22.  5.: 간사지 갈대습지 생태공원 조성사업(2차분) 착공

○ ‘24. 12.: 전체 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

살고 싶은 섬 가꾸기 사업

담당자

문화관광과 손미화(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유인섬의 가치를 극대화하고 지속가능한 여건을 조성하고 자란도 해양

치유와 연계환 섬관광 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 고성군 삼산면 두포리(와도) 일원

○ 규 모 : 주민역량강화, 마을환경개선, 관광자원활성화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000		150	850	2,000
국 비
시 도 비	1,500		75	425	1,000
시군구비	1,500		75	425	10,00
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 06.: 살고 싶은 섬 가꾸기사업 공모 선정

○ 2021. 09.: 기본계획 수립용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 06.: 기본계획 수립용역 완료

○ 2022. 08.: 실시설계용역 착수

○ 2022. 11.: 살고 싶은 섬 가꾸기사업 착공

○ 2024. 12.: 살고 싶은 섬 가꾸기사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

해양웰니스 포레스트 조성사업

담당자

문화관광과 오석환(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해양치유센터와 연계한 산책 및 심신휴양을 위한 해양치유숲길 조성으로

해양치유 관광명소 구현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023년(3년간)

○ 위 치 : 고성군 하일면 송천리 산22번지 일원

○ 규 모 : 해양웰니스 숲길 L=3.0km, 해양썬데크(명상) A=1,600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,200	2,000	100	1,000	1,100
균특전환	1,100		50	500	550
시 도 비	330		15	150	165
시군구비	2,770	2,000	35	350	385
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘18. 11.: 제3차 투자심사 및 고성군 중기지방재정계획 반영

○ ‘20. 12.: 조사측량 및 실시설계 용역 시행

○ ’21. 12.: 편입토지 보상금 지급 중(41필지 26필지 보상 완료)

□ 향후계획

○ ’22.  8.: 해양웰니스 포레스트 조성사업(1차분) 착공

○ ‘23. 12.: 전체 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 해양치유센터 건립사업

담당자

문화관광과 오석환(☎670-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해안 대표 해양치유자원을 활용한 고성군 해양치유센터 건립으로 새로운

고부가가치 관광산업 및 일자리 지역경제 활성화로 지속가능한 여건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2025년(5년간)

○ 위 치 : 고성군 하일면 송천리 108번지 일원

○ 규 모 : 해양치유센터 1동(지하1층/지상3층, 연면적 6,081㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	35,400	400	5,800	7,700	21,500
국 비	17,500		3,000	3,750	10,750
시 도 비	5,250		900	1,125	3,225
시군구비	12,650	400	1,900	2,825	7,525
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘20. 7.: 2020년도 제2차 지방재정 중앙투자심사 승인(조건부)

○ ‘20. 9.: 해양치유센터 건립사업 맞춤형 서비스 신청(조달청)

○ ’21. 2.: 해양치유센터 건립사업 공공건축 심의회 개최(조달청)

○ ‘21. 6.: 해양치유센터 건립사업 설계용역 착수

□ 향후계획

○ ’22.  6.: 해양치유센터 건립사업 중간설계 총사업비 협의(기재부)

○ ’22.  7.: 해양치유센터 건립사업 실시설계 총사업비 협의(기재부)

○ ‘22. ~’25.: 건축공사 시행 및 전체사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 사유지 매수사업

담당자

문화관광과 김현오(☎670-2545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 내 일부 사유지 소유자의 재산권 제한으로 불만 야기, 국비            지원사업으로 추진될 수 있도록 공원 내 사유지 매수 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2038.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리, 월흥리 일원

○ 규 모 : 육지부 사유지 605필지 748,046㎡(육지부 공원면적의 56%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	34,000	1,000	100	300	32,600
국 비
시 도 비
시군구비	34,000	1,000	100	300	32,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018.  8.: 상족암군립공원 사유지 매수 계획(안) 방침 결재

○ 2018. 10.: 2018년 토지매수사업비 지급 (11필지 5,043㎡)

○ 2019.  9.: 2018년 토지매수사업비 지급 (5필지 16,904㎡)

○ 2020.  9.: 2019년 토지매수사업비 지급 (2필지 502㎡)

○ 2021.  1.: 2020년 토지매수사업비 지급 (1필지 2,069㎡)

○ 2021.  5.: 2021년 토지매수사업비 지급 (3필지 1,988㎡)

○ 2022.  1.: 2022년 토지매수사업비 확보

□ 향후계획

○ 2022. ~ 2038.: 매년 예산을 확보하여 사유지 확보 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 관광벨트 인프라구축사업

담당자

문화관광과 손미화(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 교통인프라 확충을 통한 관광객 방문편의 제공 및 주변       지역 관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2023(6년간)

○ 위 치 : 경상남도 고성군 하이면 덕명리 93번지 일원

○ 규 모 : A주차장: A=9,881㎡(108면), 연결도로: L=200m,  A=1,502㎡

B주차장: A=1,683㎡(주차빌딩 2층3단)(157면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,690백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,690	798	1,172	3,250	470
균 특	4,300	538	842	2,450	470
시 도 비
시군구비	1,390	260	330	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 2017.12.28. : 경상남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 고시

○ 2020.12. 3. : A주차장 조성공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 2.10. : 지역개발사업구역 지정 및 실시계획 승인 고시

○ 2022. 6.15. : B주차장 조성공사 착공

○ 2022. 8.  : A주차장 조성공사 준공

○ 2023. 6.  : B주차장 조성공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공룡이 지나간 길 조성사업

담당자

문화관광과 손미화(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공룡탐방로와 연계한 기반인프라 정비·확충으로 이용성을 강화하고 체류형       관광으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리, 월흥리 일원

○ 규 모 : 야영장겸용 주차장 A=17,437㎡, 탐방로 L=1.5㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,375	2,199	525	651
국 비	1,425	400	525	500
시 도 비
시군구비	1,950	1,799		151
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○2017. 02. : 지방재정투자심사 완료(자체)

○2017. 08. : 2017년 지역수요 맞춤지원 공모사업 선정

○2019. 12. : 공룡이 지나간 길 조성사업(덕명주차장) 착공

○2021. 12. : 공룡이 지나간 길 조성사업(덕명주차장) 준공

○2021. 03. : 공룡이 지나간 길 조성사업(탐방로) 착공

□ 향후계획

○2022. 12: 전체 사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 2,800백만원 → 변경 3,375백만원 (증가율 20%)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

벽방산 관광자원 개발

담당자

문화관광과 김현오(☎670-2544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 벽방산 관광자원을 활용하여 테마형 관광개발로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 경남 고성군 거류면 은월리 일원

○ 규 모 : 주차장, 진입도로, 주민 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,890	431	1,798	661
국 비	1,074	100	974
시 도 비	322	30	292
시군구비	1,494	301	532	661
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017.  2.: 지방재정투자심사 완료(적정)

○ 2019.  6.: 벽방산 관광자원화 개발 주차장 공사 착공 및 준공

○ 2020.  5.: 벽방산 관광자원화 진입도로 개설공사 착공

○ 2021.  5.: 벽방산 관광자원화 진입도로 개설공사 준공

○ 2021.  6.: 벽방산 관광자원화 개발사업(주차장) 착공

○ 2021. 11.: 벽방산 진입도로 개설공사(전기) 착공

○ 2021. 12.: 벽방산 관광자원화 개발사업(건축,전기) 착공

○ 2022.  5.: 벽방산 관광자원화 개발사업(주차장) 준공

○ 2022.  6.: 벽방산 진입도로 개설공사(전기) 준공

□ 향후계획

○ 2022. 12.: 벽방산 관광자원화 사업 전체 준공

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 당 초: 주차장, 진입도로, 숲길안내센터, 특산물판매장, 어린이 놀이터 등

변 경: 주차장, 진입도로, 기타 편의시설 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

상족암군립공원 산림레포츠 시설 조성사업

담당자

문화관광과 김현오(☎670-2545)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상족암군립공원 산림자원을 이용한 모험 및 체험시설을 조성하여 상족암 문화자원과 연계한 이용성 증대 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 산31번지 일원

○ 규 모 : 레일모험시설 L=600m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	600			2,600
균특전환	1,800				1,300
시 도 비	540	390			390
시군구비	1,260	210			910
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018.  3.: 2018년도 제1차 자체 투자심사 완료(적정)

○ 2019.  7.: 산림레포츠시설 조성사업 사업계획변경 검토 보고

○ 2019. 12.: 공원계획 변경 관련 공원계획위원회 심의

○ 2021. 12.: 상족암군립공원 산림레포츠시설 조성사업(로프어드벤처) 착공

□ 향후계획

○ 2023.12.: 전체 사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 당 초: 레일모험시설 L=600m

변 경: 로프어드벤처(어린이코스 12종, 유아코스 12종), 장비보관함 1식

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

코로나19 극복 고성군민 화합행사

담당자

문화관광과 김성원(☎670-2204)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코로나19로 지친 군민에게 인기 있는 대중가수의 공연행사 관람 기회를

제공함으로써 스트레스 해소 및 고성군 홍보 효과

□ 사업개요

○ 일  시 : 2021. 12. 15.(수) 17:00

○ 장  소 : 고성군 스포츠파크 4구장

○ 출연진 : 영탁, 정동원, 박군, 박서진, 김다현, 김은주, 윤철

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	150		150
국 비
시 도 비
시군구비	150		150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 11. 25. : 내부계획 수립 및 보조금 교부

○ 2021. 11. ~ 12. : 대상자 선정

○ 2021. 12. 15. : 미스터트롯과 함께하는 고성희망드림콘서트 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성해양레포츠 아카데미 건립사업

담당자

체육진흥과 이종재(☎670-4722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최고의 다기능 해양레포츠 전문교육 시설 건립 추진

○ 체계적이고 효율적인 해양레포츠 전문 인력 양성 시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2022

○ 위 치 : 고성군 회화면 봉동리 950-7번지

○ 규 모 : 교육·훈련동(수영장, 잠수 풀) 및 생활동(숙소) 건립(지상2층/4,049.09㎡), 해상계류장 설치(50척 규모)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,000	5,539	9,436	3,025
국 비	3,999	2,495	1,504
시 도 비	7,700	1,105	4,629	1,966
시군구비	6,301	1,939	3,303	1,059
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2013.  1.: 대통령 공략사업 선정

○ 2015.  5.: 사업예정지 변경 협의(통영시→고성군)

○ 2017.  6.: 지방재정 중앙투자심사 통과

○ 2019.  1.: 기본 및 실시설계 공모 실시

○ 2019.  4.: 설계 공모 완료 및 실시설계 용역 착수

○ 2020.  1.: 경상남도 지방건설기술심의회 심의

○ 2020.  4.: 경남도 계약심사 완료

○ 2020.  7.: 공사 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2022. 2.: 공사 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 야구장 조성사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎5844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 체육시설과 연계한 체육 인프라 구축을 통한 체육활동 증대

○ 전지훈련팀 유치로 지역경제 부가가치 창출 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 기월리 83-6번지 일원

○ 규 모 : 야구장 조성 1면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,500	4,900	3,600
국 비	2,000	1,000	1,000
시 도 비
시군구비	6,500	3,900	2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 11.: 공유재산 관리계획 승인

○ 2017. 9. ~ 2020. 9.: 사전 행정절차 및 편입토지 보상협의 완료

○ 2019. 4. ~ 2020. 7.: 실시설계 용역 착수 및 완료

○ 2020. 10. ~ 2021. 12.: 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 2022. 1.~: 시설 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동해 생활체육시설 조성사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎5844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역민과 기업체 근로자의 생활체육 활동 참여 증대를 통한 건강증진 및 복지 향상

○ 체육기반시설 확충으로 지역 균형발전 도모 및 지역민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 고성군 동해면 장기리 368-2번지 일원

○ 규 모 : 다목적운동장 조성 1면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500	2,100	3,000	2,400
국 비	900			900
시 도 비
시군구비	6,600	2,100	3,000	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2020. 4.: 공유재산 심의 및 지방재정 투자심사 완료

○ 2020. 5. ~ 2020. 11.: 장기지구 지구단위계획 결정(변경) 용역 착수 및 완료

○ 2020. 8. ~ 2021. 3.: 손실보상 협의, 실시설계 용역 착수 및 완료

○ 2021. 10.: 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 10.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

반다비 체육문화센터 건립사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎5844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활밀착형(장애인형) 체육시설 확충으로 국민체력 증진

○ 지역주민의 문화적 욕구 충족을 위한 생활문화 커뮤니티 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 11.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 기월리 90번지 일원

○ 규 모 : 체육문화센터 건립 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,700	2,800	3,900	3,000
국 비	5,900	1,600	2,600	1,700
시 도 비	1,800	400	700	700
시군구비	2,000	800	600	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2019. 8.: 공유재산 관리계획 수립

○ 2019. 9.: 생활SOC 복합화사업 공모 선정

○ 2019. 12. ~ 2020. 3.: 건축기획 용역 착수 및 완료

○ 2020. 8. ~ 2021. 3.: 기본 및 실시설계 용역 착수 및 완료

○ 2021. 7.: 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 11.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

종합운동장 및 스포츠타운 침수구역 개보수사업

담당자

체육진흥과 정학록(☎5844)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공체육시설 내 안전을 위하여 노후시설 개보수 필요

○ 체육활동 참여기회 확대 및 관람 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 7.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 기월리 90번지 일원

○ 규 모 : 침수구역 개보수 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000		2,000
국 비	1,000		1,000
시 도 비
시군구비	1,000		1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2020. 9.: 공모사업 선정

○ 2020. 10. ~ 2021. 1.: 실시설계 용역 착수 및 완료

○ 2021. 6.: 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 7.: 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동계전지훈련스토브리그 개최 지원

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 및 고성군 홍보

○ 다양한 종목의 스토브리그 개최를 통한 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. 11. ~ 2. 10.

○ 위 치 : 고성군 일원

○ 규 모 : 5개 종목, 60여 개팀, 2,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	210		210	210	210
국 비
시 도 비
시군구비	210		210	210	210
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 1. 7. : 2021 동계전지훈련 스토브리그 보조금 교부 완료

○ 2021. 1. 11. ~ 2. 10. : 2021 동계전지훈련 스토브리그 개최

○ 2022. 1. 3. : 2022 동계전지훈련 스토브리그 보조금 교부 완료

○ 2021. 1. 3. ~ 2. 20. : 2022 동계전지훈련 스토브리그 개최

□ 향후계획

○ 2023 동계전지훈련 개최 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 대학배구 연맹전

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 전국 대학배구대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 6. 28. ~ 7. 6.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터

○ 규 모 : 17개 대학, 19개 팀, 1,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	160		160	160	160
국 비
시 도 비
시군구비	160		160	160	160
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 6. 24. : 한국대학배구연맹 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 6. 28. ~ 7. 6. : 2021 전국대학배구 고성대회 개최

○ 2022. 6. 23. : 한국대학배구연맹 및 고성군배구협회 보조금 교부 완료

○ 2022. 6. 29.~7. 7. : 2022 대한항공배 전국대학배구 고성대회 개최

□ 향후계획

○ 2023 전국대학배구 유치 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 당구대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 전국 당구대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8. 11. ~ 8. 15.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터 및 고성군역도경기장

○ 규 모 : 4개 종목, 300여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	160		160	160	160
국 비
시 도 비
시군구비	160		160	160	160
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 8. 6. : 대한당구연맹 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 8. 11.~8. 15. : 2021 경남고성군수배 전국당구선수권대회 개최

□ 향후계획

○ 2022. 8. 17. ~ 8. 21. : 제3회 고성군수배 전국당구선수권대회 개최 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 중학교 축구대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 및 고성군 홍보

○ 전국 중학교 축구대회 개최를 통한 관련 종목단체 전국대회 능력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 7. 24. ~ 8. 5.

○ 위 치 : 고성군스포츠타운 및 동고성체육공원

○ 규 모 : 34개 팀, 1,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	180		180	180	180
국 비
시 도 비
시군구비	180		180	180	180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 7. 29. : 부산일보사 및 고성군축구협회 보조금 교부 완료

○ 2021. 7. 24. ~ 8. 5. : 제58회 청룡기 전국중학교 축구대회 개최

□ 향후계획

○ 2022. 8. 5. ~ 8. 18 : 제59회 청룡기 전국중학교 축구대회 개최 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 중고배구대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 전국 중고배구대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. 13. ~ 3. 19.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터, 고성군실내체육관, 경남항공고

○ 규 모 : 45개 팀, 1,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	160		160	160	160
국 비
시 도 비
시군구비	160		160	160	160
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 3. 3. : 한국중고배구연맹 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 3. 13. ~ 3. 19. : 2021 춘계 전국 남녀 중고 배구연맹전 개최

○ 2021. 3. 18. : 2022 춘계 전국 남녀 중고 배구연맹전 유치 신청서 제출

□ 향후계획

○ 2022 전국 중고배구대회 유치 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 씨름대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 전국 씨름대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. 14. ~ 4. 20.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터

○ 규 모 : 119개 팀, 1,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	170		170	170	170
국 비
시 도 비
시군구비	170		170	170	170
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 4. 9. : 대한씨름협회 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 4. 14. ~ 4. 20. : 제51회 회장기전국장사씨름대회 개최

□ 향후계획

○ 2022 전국 씨름대회 유치 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국 핸드볼대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 전국 핸드볼대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. 22. ~ 3. 28.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터, 고성군실내체육관

○ 규 모 : 44개 팀, 1,000여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	130		130	130	130
국 비
시 도 비
시군구비	130		130	130	130
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 3. 16. : 부산일보사 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 3. 22. ~ 3. 28. : 2021 대한핸드볼협회장배 전국 중고등 선수권대회 개최

○ 2022. 3. 19. ~ 3. 25. : 대한핸드볼협회장배 전국 중고등 선수권대회 개최

□ 향후계획

○ 2023 대한핸드볼협회장배 전국 중고등 선수권대회 유치 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

민속씨름대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화

○ 민속씨름대회 개최를 통한 고성군 홍보 및 스포츠 도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 8. 1. ~ 8. 6.

○ 위 치 : 고성군국민체육센터

○ 규 모 : 15개 팀, 200여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	200		200	200	200
국 비
시 도 비
시군구비	200		200	200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 7. 30. : 대한씨름협회 및 고성군씨름협회 보조금 교부 완료

○ 2021. 8. 1. ~ 8. 6. : 2021 민속씨름 고성장사씨름대회 개최

□ 향후계획

○ 2022 민속씨름대회 유치 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

전국카누선수권대회

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠마케팅을 통한 지역경제 활성화 및 고성군 홍보

○ 수상종목 활성화 및 관련 종목단체 전국대회 능력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 9. 2. ~ 9. 6.

○ 위 치 : 고성군 대가면 대가저수지

○ 규 모 : 500여 명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	180		180	180	180
국 비
시 도 비
시군구비	180		180	180	180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 8. 27 : 대한카누연맹 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2021. 9. 2 : 2021년도 카누 스프린트 국가대표 선발전 개최

○ 2021. 9. 3. ~ 9. 6. : 제39회 전국카누선수권대회 겸 2021년도 카누 슬라럼                          국가대표 선발전 개최

○ 2022. 4. 7. : 대한카누연맹 및 고성군체육회 보조금 교부 완료

○ 2022. 4. 14. ~ 4. 18. : 2022년도 카누 국가대표 선발전 및 제39회 회장배                            전국카누경기대회 개최

□ 향후계획

○ 2023년도 전국카누선수권대회 유치 추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

지역특화 스포츠관광산업

담당자

체육진흥과 송해용(☎2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠대회, 교육, 연계관광을 융합한 일자리 및 수익 창출을 위한 새로운       비즈니스 모델 확립

○ 스포츠대회를 중심으로 연중 이용가능한 새로운 관광서비스 개발을 통한       지역특화 스포츠관광산업의 대중화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 6. ~ 12.

○ 위 치 : 고성군 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,070		427	500
국 비	500		97
시 도 비
시군구비	570		330	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2021. 8. 19. : 2021 1차 보조금 경남대 산학협력단 교부 완료

○ 2021. 8. ~ 12. : IRONMAN Goseong Sports-Care Tour Festa

○ 2021. 10. 13. : 2021 2차 보조금 대한수영연맹 교부 완료

○ 2021. 8. ~ 12. : 2022 오픈워터스위밍 국제대회 파견 선발대회 개최

○ 2021. 11. 9. : 2021 3차 보조금 대한철인3종협회 교부 완료

○ 2021. 8. ~ 12. : 2021 고성 철인3종 선수권대회 겸 2022 국가대표 선발전 개최

○ 2021. 12. 1. : 2021 4차 보조금 고성군체육회 교부 완료

○ 2021. 12. 4. ~ 12. 5. : 2021 스포츠관광 아이언고성 대회(듀에슬론) 개최

○ 2022. 3. 25. : 2022 1차 보조금 대한철인3종협회 교부 완료

○ 2022. 4. 3. ~ 4. 25. : 2022 철인3종 국가대표 선발전 개최

○ 2022. 6. 13. : 2022 2차 보조금 대한철인3종협회 교부 완료

○ 2022. 6. 17. ~ 6. 19. : 2022 고성 아이언맨 70.3 대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 국비보조금 지원중단(500백만원)에 따른 국비 대상 사업 미집행

-IRON-Goseong 스포츠 관광 대회(230백만원), Sports-Care 인력양성 및 운영(210백만원)

-브랜드개발(30백만원), 홍보비(30백만원)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

경남도민체육대회 참가

담당자

체육진흥과 박준상(☎4714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 제60회 경남도민체육대회 참가를 통한 엘리트 체육 저변 확대 및 군민의

체위 향상

○ 종목별 원활한 훈련 및 대회 참가 보조를 통한 상위 성적 목표

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. 11. 26.(금) ~ 29.(월) 4일간

○ 위 치: 창원시 일원

○ 규 모: 15개 종목 133여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	570		126	214	230
국 비
시 도 비
시군구비	570		126	214	230
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%, 계속사업)

○ 2021. 11. 26(금) ~ 11. 29.(월) 대회 개최 완료

□ 향후계획

○ 2022. 6. 7.          : 제61회 경남도민체육대회 추진에 따른

고성군체육회에 보조금 교부 완료

○ 2022. 7. 21. ~ 8. 25. : 대회요강에 따른 참가신청, 대표자 추첨 등

대회추진

○ 2022. 8. 26. ~ 29.   : 제61회 경남도민체육대회 진행

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스마트양식 클러스터 조성사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 발전소 회처리장 및 온배수 활용 고성주도형 스마트양식 전진기지 구축

○ 유휴자원 활용을 통한 침체된 지역경제 활성화 및 지역일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 하이면 덕호리 810-5번지 일원

○ 규 모 : 테스트베드(시험·실증센터 16,000㎡), 배후부지(기반조성 84,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 40,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	40,000	23,000	9,000	8,000
국 비	22,000	13,500	4,500	4,000
시 도 비	5,400	2,850	1,350	1,200
시군구비	6,600	4,050	1,350	1,200
지 방 채	-	-	-	-
민간자본	6,000	2,600	1,800	1,600
기 타	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2021. 06. : 테스트베드 및 배후부지 실시설계 용역 착수

○ 2021. 08. : RAS(순환여과양식시설) 기본설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 지반보강 공사 및 배후부지 기반조성 착공

○ 2023. 12. : 배후부지 기반조성 및 테스트베드 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동문항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 어촌·       어항 통합 개발 필요

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양 관광자원을       보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나, 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는        기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키고 지역주민 소득       증대를 위한 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜300사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 하일면 동화리(동문항)

○ 규 모 : 공통사업(방파제 환경개선, 접안시설 정비, 어민편의시설 확충 등),               특화사업(어촌체험마을 기반구축, 동화맛남센터, 소을비포 역사광장,               동화바다 조명길 및 기반 정비 등), S/W사업(주민역량강화 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,569백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,569	2,449	3,772	3,348
국 비	6,600	1,714	2,640	2,246
시 도 비	849	221	340	288
시군구비	1,980	514	792	674
지 방 채	-	-	-	-
민간자본	140	-	-	140
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2022. 03. : 생활SOC공사 선발주 및 준공

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 실시설계용역 완료 및 시행계획 수립

○ 2022. 09. : 공사발주

○ 2023. 12. : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당항항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 어촌·       어항 통합 개발 필요

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양 관광자원을       보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나, 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는        기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키고 지역주민 소득       증대를 위한 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜300사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 회화면 당항리(당항항)

○ 규 모 : 공통사업(어항시설 정비, 안전난간 및 어구보관창고 설치 등),                  특화사업(당항복지회관 조성, 해상 조망공간 조성, 해상보도교                 조형물 설치, 당항어촌회관 리모델링 등), S/W사업(주민역량강화 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,572	2,484	3,827	3,261	-
국 비	6,698	1,739	2,679	2,280	-
시 도 비	861	223	344	294	-
시군구비	2,009	522	804	683	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4	-	-	4	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2022. 03. : 생활SOC공사 선발주 및 준공

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 실시설계용역 완료 및 시행계획 수립

○ 2022. 09. : 공사발주

○ 2023. 12. : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당동항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 박건욱(☎670-4673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 어촌·       어항 통합 개발 필요

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양 관광자원을       보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나, 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는        기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키고 지역주민 소득       증대를 위한 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜300사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 거류면 당동, 신용리(당동항)

○ 규 모 : 공통사업(선착장 정비, 수산물 공동작업장, 안전시설 정비 등),                 특화사업(달뜨는 해상광장, 별빛장터, 별빛캠프, 별빛둘레길 등),                S/W사업(주민역량강화 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,768백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,768	2,484	3,827	3,457	-
국 비	6,698	1,739	2,679	2,280	-
시 도 비	861	223	344	294	-
시군구비	2,009	522	804	683	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	200	-	-	200	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2022. 03 : 생활SOC공사 선발주 및 준공

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 실시설계용역 완료 및 시행계획 수립

○ 2022. 09. : 공사발주

○ 2023. 12. : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

입암·제전항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 양지훈(☎670-4674)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 어촌·       어항 통합 개발 필요

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양 관광자원을       보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나, 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는        기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키고 지역주민 소득       증대를 위한 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜300사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 하이면 월흥리, 덕명리(입암항, 제전항)

○ 규 모 : 공통사업(부잔교, 안전시설, 해상작업대 등), 특화사업(입암공룡홍보센터,                해상광장, 해안탐방로, 주상절리 경관조명, 바다공룡 해상공원 등),                   S/W사업(주민역량강화 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,104백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,104	10,484	2,620	-	-
국 비	9,173	7,338	1,835	-	-
시 도 비	1,179	944	235	-	-
시군구비	2,752	2,202	550	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2022. 07 : 홍보센터 BF본인증 승인 및 건축공사  준공

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 전체 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신부항 어촌뉴딜300사업

담당자

해양수산과 양지훈(☎670-4674)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 어촌·       어항 통합 개발 필요

○ 어촌은 바다, 섬, 자연경관, 해양레저, 수산자원 등의 다양한 해양 관광자원을       보유하고 있어 성장 잠재력이 풍부하나, 어촌의 혁신성장을 주도할 수 있는        기본적 인프라 및 콘텐츠가 절대적으로 부족한 실정

○ 어촌지역을 활력이 넘치는 매력적인 공간으로 재탄생시키고 지역주민 소득       증대를 위한 해양수산부 공모사업인 어촌뉴딜300사업 추진 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 고성읍 신월리(신부항)

○ 규 모 : 공통사업(부잔교 설치, 물양장 정비 등), 특화사업(해지개어울림센터,                해지개다리 정비, 해지개 식도락장터, 해지개소공원 정비, 경로당                 리모델링 등), S/W사업(주민역량강화 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,452백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,452	-	1,674	3,348	3,430
국 비	5,859	-	1,172	2,344	2,343
시 도 비	753	-	151	301	301
시군구비	1,758	-	351	703	704
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	82	-	-	-	82
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 07. : 실시설계중

□ 향후계획

○ 2022. 09. : 실시설계용역 완료 및 시행계획 수립

○ 2022. 10. : 공사착공

○ 2023. 12. : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

수산물 유통물류센터 건립

담당자

해양수산과 옥경연(☎670-2453)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경남 고성에서 생산된 가리비의 집하. 유통 가공시설등의 부재로 안정적인

어업소득 확보 애로

○ 상시 생산수산물의 보관, 유통기능을 강화하고 상품특화 및 성장을 위해

고성군 수산물 유통물류센터 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.

○ 위 치 : 경상남도 고성군 고성읍 수남리 479-5

○ 규 모 : 고성군 수산물 유통물류센터 신축 1식

·대지면적 1,173㎡/ 연면적 990㎡/ 지상 2층

·주요시설: 냉동냉장실, 급냉실, 제빙실, 작업실, 사무실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000		5	295	1,700
국 비
시 도 비	1,300		3.3	192	1,105
시군구비	700		1.7	103	595
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 07. : 건축설계 간이공모 추진 중

□ 향후계획

○ 2022. 08. : 건축설계 간이공모 당선작 선정

○ 2022. 11. : 실시설계 용역완료

○ 2022. 12. : 공사착공

○ 2023. 05. : 공사준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

갈모봉 선도산림경영단지 조성사업

담당자

녹지공원과 여치국(☎670-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영세한 산림경영의 집단화, 규모화, 체계화를 통해 산주들의 소득 증대에 기여하고, 사유림 경영의 성공모델을 개발·확산시켜 지속가능한 사유림 경영 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2029. 12. (10년간)

○ 위 치 : 경남 고성군 고성읍 이당리 산1번지 외 357필지

○ 규 모 : 1,027.9ha(조림, 숲가꾸기, 임목생산, 임도사업, 임산물특화단지 조성 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500	500	780	780	5,440
국 비	5,250	350	546	546	3,808
시 도 비	675	45	70	70	490
시군구비	1,575	105	164	164	1,142
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 20. 03.: 지방재정투자심사 완료

○ 20. 12.: 기본계획 수립 및 임도신설(0.74km) 완료(1년차)

○ 21. 12.: ‘21년도 선도산림경영단지 조성사업 완료(2년차)

(숲가꾸기 37.6ha / 임도사업 1.76km(신설), 0.20km(보강))

○ 22. 06.: ‘22년도 선도산림경영단지 조성사업 시행 중(숲가꾸기 20ha 완료)

□ 향후계획

○ 22. 12.: ’22년도 선도산림경영단지 조성사업 완료(숲가꾸기 37ha / 임도신설 1.5km)

○ 23. 01.: ‘23년도 선도산림경영단지 조성사업 시행 예정

(조림 7ha / 숲가꾸기 15ha / 임도신설 1.5km)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성갈모봉 자연휴양림 조성사업

담당자

녹지공원과 신다예(☎670-2673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 산림자원 및 자연환경을 종합적으로 체험할 수 있는 자연       휴양림을 조성하여 질 높은 산림복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. 1. ~ 2023. 7.(5년간)

○ 위 치 : 경남 고성군 고성읍 이당리 산146-1번지 일원

○ 규 모 : 방문자센터, 숲속의집, 숲속도서관, 특산물판매장 등(619,829㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	206.306	93.694	3,110	1,590
국 비	2,500	103.153	46.847	1,555	795
시 도 비	750	30.946	14.054	466.5	238
시군구비	1,750	72.207	32.793	1,088.5	557
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2018. 6.: 자연휴양림 지정고시(산림청)

○ 2019. 4. ~ 2020.10.: 자연휴양림 기본계획 및 실시설계

○ 2021. 5.: 자연휴양림 조성계획 승인(경남도)

○ 2021. 5.: 자연휴양림 조성사업 시행

□ 향후계획

○ 2023. 7.: 자연휴양림 조성사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성읍 서부권 생활SOC복합화사업

담당자

녹지공원과 임경신(☎670-2663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그동안 방치되어 온 구)공설운동장을 활용하여 어린이도서관, 주거지주차장,       공원을 조성으로 군민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 교사리 53번지 일원

○ 규 모 : 18,810㎡

- 어린이도서관 면적:1,200㎡, 지하1층 지상2층

- 주거지주차장: 1,100㎡

- 공원: 16,510㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,200	6,556	25	4,742	4,877
국 비	1,449		11	1,438
시 도 비	3,341			1,190	2,151
시군구비	11,410	6,556	14	2,114	2,726
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 20. 09.: 지방재정투자심사 완료

○ 20. 11. ~ : 기본계획 수립용역

○ 21. 08.: 기본계획 수립완 료

○ 21. 10.: 실시설계 공모

○ 21. 12.: 실시설계 공모 심사 및 당선작 선정

○ 22. 01.: 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 22. 08.: 실시설계 용역 완료

○ 22. 12.: 공사 착공

○ 23. 12.: 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

해당사항없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

남산공원 일몰제 적극 대응

담당자

녹지공원과 장배석(☎670-2664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남산공원 유지를 위한 일몰제(실효) 대응하기 위하여 사유지 매입

□ 사업개요

○ 기 간 : ~ 2026(계속사업)

○ 위 치 : 고성읍 동외리 366번지 일원

○ 규 모 : A=798,465㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 60,134백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	60,134	55,351	1,052	731	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	60,134	55,351	1,052	731	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83.4%)

○ 편입토지 보상협의(665,989㎡/798,465㎡)

○ 토지 감정평가

○ 토지 등기이전 및 보상

※ 공원내 토지보상 사업으로서 계속적인 반복

□ 향후계획

○ 남산공원 잔여 사유지 매입(132,476㎡)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

LNG벙커링 핵심기자재지원

기반구축사업

담당자

일자리경제과 이정화(☎670-2314)

□ 사업목적 및 필요성

○ LNG벙커링 신규 시장 선점을 위한 핵심기자재 개발 및 설계역량 확보 필요

○ 개발된 기자재의 국제 경쟁력을 확보를 위한 성능 시험 지원 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년간)

○ 위 치 : 고성군 동해면 용정리 158번지 일원

○ 규 모 : 27,308㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 31,935백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	31,935	20,877	6,653	4,405
국 비	10,000	6,522	2,863	615
시 도 비	11,200	5,600	2,800	2,800
시군구비	10,300	8,500	900	900
지 방 채
민간자본	435	255	90	90
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2017. 4.: 산업부 2018년 지역산업거점기관지원 대상사업 확정

○ 2018. 5.: 경남도·한국기술진흥원·경남TP·고성군 전자협약 체결

○ 2018. 8.: 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성 검토 용역 시행

○ 2019. 5.: 부지조성사업 착공

○ 2020. 2.: 시험인증센터 건축 착공

○ 2021. 7.: LNG벙커링 핵심기자재 지원 기반구축 시험인증센터 완공

○ 2021. 8.: 경남테크노파크 조선해양센터 입주(직원 19명)

□ 향후계획

○ 2022. 7.: 부지조성사업 완공

○ 2022.12.: LNG벙커링 핵심기자재 기반구축사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

이당일반산업단지 조성사업

담당자

일자리경제과 김윤석(☎670-2344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특정 산업 의존도 완화를 위해 고성군 차기 산업인 항공산업

관련 부품전문 업체 유치 및 투자촉진

○ 항공산업 기업유치를 통한 고성군 장기 지속발전 가능한 경제구조 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.(5년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 교사리 891-13번지 일원

○ 규 모 : 산업단지 조성 131,270㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,291백만원(도비 700, 군비 29,591)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,291	23,741	6,550	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	700	300	400	-	-
시군구비	29,591	23,441	6,150	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2019.  9.: 산업단지계획심의위원회 심의

○ 2019.  9.: 산업단지계획 승인 및 고시

○ 2019. 10.: 산업단지 및 KAI 공장건립 착공

○ 2020.  6.: 산단진입도로 도로공사 시행허가 신청

○ 2020.  8.: 산업단지계획(변경)

○ 2020. 10.: KAI 공장건립 준공

○ 2021.  3.: 한국항공우주산업(주) 공장 가동

○ 2021.  5.: 지원시설(식당) 신축 공사 준공

○ 2021.  6.: 이당산단 기반시설 완료(도로, 주차장, 오수처리장)

○ 2022.  6.: 이당산단 진입도로 준공

□ 향후계획

○ 2022.  12.: 이당일반산업단지 조성사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공룡시장 주차환경 개선사업

담당자

일자리경제과 박현미(☎670-2303)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 시설물 노후로 인한 방문고객 불편을 해소하고, 시장 방문객

안전확보 및 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 5.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 일원

○ 규 모 : 주차 63면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,350백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,350	2,376	974
국 비	2,010	1,426	584
시 도 비	-
시군구비	1,340	950	390
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 9. ~ : 공룡시장 주차환경개선사업 편입부지 보상

○ 2020. 5. : 공룡시장 주차환경개선사업 사업변경 승인(사업부지 추가)

○ 2020. 7. : 공룡시장 주차환경개선사업(1차) 실시

○ 2020. 11.: 공룡시장 주차환경개선사업(2차) 실시

○ 2020. 12.: 문화재 정밀조사 용역 실시

○ 2021. 5. : 공룡시장 주차환경개선사업 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초

- 사업규모 : 주차장 839㎡(고성군 고성읍 성내리 203 외 2필지)

○ 변경(최종)

- 사업규모 : 주차장 2,282㎡, 소공원 386㎡

(당초 사업대상지, 고성군 고성읍 성내리 212-2 외 4필지 추가)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

무인항공기 통합시험 및 훈련기반 구축사업

담당자

일자리경제과 김동우(☎670-2345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부 혁신성장 8대 선도사업인 무인기 산업 발전을 위한 기본 인프라 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.(5년간)

○ 위 치 : 고성군 동해면 내곡리(무인기종합타운 내)

○ 규 모 : 건축면적 1,816㎡, 연면적 2,451㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,700백만원                               (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,700	9,400	3,900	5,400
국 비	12,400	6,000	1,000	5,400
시 도 비	4,000	3,400	600
시군구비	2,300		2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

❍ 2018. 8.: 무인기 통합시험□훈련기반 구축사업 선정(국무회의 의결)

❍ 2019. 8.: 무인기 통합시험시설 장비구축 용역 발주(국토교통부)

❍ 2020. 3.: 제1차 경상남도 지방재정투자심사 결과통보

❍ 2020. 8.: 무인기 통합시험□훈련기반 구축사업 실시설계 용역

❍ 2021. 5.: 무인기 통합시험□훈련기반 구축사업 착공

□ 향후계획

○ 2022. 8.: 무인기 통합시험□훈련기반 구축사업 준공(예정)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

도시교통과 윤석(☎670-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 공영차고지를 조성하여 주택가 이면도로 밤샘주차로 인한         소음 발생 및 각종 사고 위험 등의 주민불편 해소

○ 화물자동차 운전자를 위한 편의시설 제공 및 산업물류수송 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2022.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 율대리 1029번지

○ 규 모 : 면적 19,794㎡(주차면 143면, 관리동 및 휴게동 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,093백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,093	2,366	2,177	550
국 비	1,761	1,376	385
시 도 비	1,286	232	1,054
시군구비	2,046	758	738	550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2016. 12. : 화물차 공영 차고지 건립 타당성 조사 실시

○ 2017. 12. : 고성군계획시설(주차장: 화물자동차) 결정 용역 발주

○ 2019. 11. : 편입토지 보상 및 실시설계용역 시행

○ 2019. 12. : 군계획시설 결정 및 고시

○ 2020.  3. : 지질조사 용역 준공

○ 2020.  6. : 고성군 화물자동차 공영차고지 조성사업 발주

○ 2020.  9. : 소규모환경영향 및 재해영향평가 완료

○ 2020.  9. : 실시계획 인가고시 및 토목공사(1차분) 착공

○ 2020.  9. : 농업진흥구역 해제고시

○ 2020. 10. : 실시설계(토목) 완료

○ 2021.  1. : 지원시설(관리동, 화장실) 설계용역 발주

○ 2021.  3. : 지원시설 BF인증용역 발주

○ 2021.  4. : 2차분 공사(토목) 발주

○ 2021. 11. : 2차분 공사(토목) 준공

□ 향후계획

○ 2022.  6. : 지원시설 공사(건축, 전기, 통신) 발주

○ 2022.  9. : 지원시설 공사 준공 및 운영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

DS2차아파트 주변도로 (소로2-16호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2024.(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=324.0m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,080	920	200		1,960
국 비
시 도 비
시군구비	3,080	920	200		1,960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017. 12. : 실시설계 완료

○ 2018. 7. : 2018년 2차 투자심사 승인(적정)

○ 2018. 8.~ : 보상협의 추진

□ 향후계획

○ 2023. 1.~ : 보상협의 추진 계속

○ 2024. 1. : 공사 착공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성읍 공영주차장 조성사업

담당자

도시교통과 윤석(☎670-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고성읍 시가지내 공영주차장을 조성하여 주차난 해소 및 원활한 교통 소통과       지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.

○ 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 19번지 일원

○ 규 모 : 면적 1,865㎡(주차면 60면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	2,605	1,395
국 비	2,000	1,302.5	697.5
시 도 비	2,000	1,302.5	697.5
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 6. : 토지 손실보상 협의

○ 2019.12. : 주차장 조성공사 실시설계 용역

○ 2020. 6. : 지장물 철거

○ 2020. 8. : 지질조사 용역

○ 2020. 9. : 임시주차장 운영

○ 2021. 4. : 주차장 공사 착공

○ 2021. 6. : 주차장 공사 준공

○ 2021. 7. : 주차장 위수탁관리 계약 및 운영

개별 투자심사 사업 추진현황 (21년말 기준 현행화)

사업명

송학광장~제일교회간 도로(소로1-5호) 개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2021.(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 서외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=154.8m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,230	1,830	600
국 비
시 도 비	200	200
시군구비	2,230	1,630	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 11. : 2019년 3차 투융자심사 승인(적정)

○ 2020. 6. : 사업 착공

○ 2021. 4. : 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

버스터미널~기월사거리간 도로

(중로1-10호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간: 2017~2023년(7년간)

○ 위 치: 고성군 고성읍 송학리, 기월리 일원

○ 규 모: 도시계획도로 개설 L=780m, B=24.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 10,900백만원/70%

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,900	5,650	1,100	3,000	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	10,900	5,650	1,100	3,000	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2016.  8.: 실시설계 완료

○ 2017.  5. ~ : 보상협의 추진

○ 2020.  6.: 공사 착공

○ 2021.  6.: 1차분 공사 준공

□ 향후계획

○ 2022.  6.: 2차분 공사 준공

○ 2022. 12.: 3차분 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성향교~남외마을간 도로

(소로1-7호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2023년(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 서외리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=875m, B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,900	650	700	250	1,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,900	650	700	250	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2017. 1. : 실시설계 완료

○ 2019. 1. ~ : 보상협의 추진

○ 2022. 3. : 1구간 사업 착공

○ 2022. 12. : 1구간 사업 준공

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ : 2구간 사업 착공 예정

○ 2023. 12. ~ : 전체 사업 준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성여중~구농어촌공사간 도로

(소로2-12호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2024년(8년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=392m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023 이후
계	3,330	1,330	100	200	1,700
국 비
시 도 비
시군구비	3,330	1,330	100	200	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 1. : 실시설계 완료

○ 2018. 1. ~ : 보상협의 추진

□ 향후계획

○ 2023. 1. : 1구간 사업 착공 예정

○ 2023. 12. : 1구간 사업 준공 예정

○ 2024. 1. : 2구간 사업 착공 예정

○ 2024. 12. : 2구간 사업 준공 예정

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대성초교~고성초교간 도로

(소로2-19호선)개설공사

담당자

도시교통과 손현철(☎670-2573)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기 미집행 도시계획도로 개설을 통한 도시기반시설 확보와 지역발전여건 조성

○ 도로망 정비로 인한 교통량 분산 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간: 2015~2022년(8년간)

○ 위 치: 고성군 고성읍 성내리, 서외리 일원

○ 규 모: 도시계획도로 개설 L=146m, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 2,300백만원/70%

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,300	1,910	200	190	-
국 비
시 도 비	200	130		70
시군구비	2,100	1,780	200	120	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2015.  5. : 실시설계 완료

○ 2016.  1. ~ : 보상협의 추진

○ 2020.  5. : 공사 착공

○ 2021.  6.: 문화재발굴(정밀) 조사 완료

□ 향후계획

○ 2022. 9.: 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

서외리 공영주차장 조성사업

담당자

도시교통과 윤석(☎670-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택가 밀집지역에 주차장 조성으로 불법 주정차 민원 해소 및 주차 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치: 고성군 고성읍 서외리 34-2번지 일원

○ 규 모: 주차장 조성 1식(2,291㎡/100면 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,500		719	1,581	1,200
국 비	1,750		359.5	790.5	600
시 도 비
시군구비	1,750		359.5	790.5	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2차분 토지 매입 완료(2,292㎡ 중 1,837㎡ 매입 완료)

□ 향후계획

○ 2022. 11.: 실시설계 용역

○ 2023.  3.: 보상협의 및 토지매입 (3차, A=454㎡)

○ 2023.  4.: 주차장 조성공사 착공

○ 2023.  6.: 주차장 완공 및 운영

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시재생 뉴딜사업 (송학고분군지구)

담당자

도시교통과 신광철(☎670-2553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴한 도심의 도시재생사업을 통한 경쟁력 강화와 생활, 문화, 주거 및  공동체 재생을 통하여 정주환경 개선 및 자생력 강화

□ 사업개요

○ 기 간: 2021 ~ 2023(3년간)

○ 위 치: 고성읍 송학리 무학마을 일원

○ 규 모: 우리동네 살리기 1개소(50,000㎡, 어울림샛터등 거점시설 3개소, 주민역량 강화사업 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 6,667백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,667	1,867	327	2,337	2,136
국 비	4,000		287	1,933	1,780
시 도 비	800	-	40	404	356
시군구비	1,867	1,867	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021.  2.: 송학고분군지구 매입건축물 철거완료

○ 2021.  8.: 거점시설 기본 및 실시설계 착수

○ 2021.  9.: 문화재 정밀발굴조사 완료

□ 향후계획

○ 2022. 10.: 거점시설 기본 및 실시설계 완료 및 건축공사 착공

○ 2023. 12.: 거점시설 건축공사 준공 및 역량강화사업 등 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

봉화골마을 진입도로 정비공사

담당자

건설과 이주헌(☎670-2584)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미 개설 도로 개설로 마을간 연결도로 확충 및 하이면 도로망 구축으로          지역 균형개발에 기여

□ 사업개요

○ 기   간: 2018년 1월 ~ 2023년 12월

○ 위   치: 경남 고성군 하이면 일원

○ 규   모: 도로개설 L=1,800m, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,960	911	1,349	1,600	1,100
국 비
시 도 비
시군구비	4,960	911	1,349	1,600	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 11.: 지방재정투자심사 완료

○ 2020.  6.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 1공구 총괄분 공사 착공

○ 2021. 10.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 2공구 총괄분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 11.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 2공구 총괄분 공사 준공

○ 2022. 12.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 1공구 총괄분 공사 준공

○ 2023.  2.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 잔여분 공사 착공

○ 2023. 12.: 봉화골마을 진입도로 확포장공사 잔여분 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 변경: 당초 2018. 1. ~ 2022. 12. → 변경 2018. 1. ~ 2023. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고성군 마을정비형 공공주택 건립사업

담당자

건축개발과 정지연 (☎670-2273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 지역 정비와 연계하여 임대주택 사업을 시행함에 따라 도시 미관 개선으로 건전한 상생 문화 정착을 도모함과 동시에 안정적인 주택 공급및 주거 환경 개선을 통한 삶의 질을 향상 하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2023년(7년간)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 서외리 252-2번지 일원

○ 규 모 : 공동주택 110세대, 2개동, 지상 5~8층, 연면적 6,456.45㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,392백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,392	2,300	6,235	10,857	1,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,300	1,000	535	1,765	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	17,092	1,300	5,700	9,092	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016.  9.: 마을정비형 공공주택 공모사업 선정

○ 2017.  4.: 고성군과 사업시행자(LH)협약 체결

○ 2018. 12.: 공동주택건설 사업계획 승인(국토교통부 고시2018-915호)

○ 2021. 10.: 토지 보상 완료

○ 2021. 12.: 공사 착공

○ 2022.  6.: 4층 골조 공사중

□ 향후계획

○ 2022.  7.: 입주자 모집 공고

○ 2022. 11.: 입주자 당첨자 발표

○ 2023.  5.: 공사 준공

○ 2023.  8.: 입주 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

먹거리통합지원센터 건립

담당자

농식품유통과 이영미(☎670-4833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 우수 농·수·축산물의 학교급식 확대로 안전한 먹거리 제공과 급식의 공공성 강화

○ 지역 농·수·축산물 조달로 지역농업 육성 및 농가소득 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월(2년)

○ 위 치 : 고성군 고성읍 우산리 248-7 외 4필지

○ 규 모 : 먹거리통합지원센터 건립 1식(건축 연면적: 693.75㎡)

- 주요시설: 사무실, 선별포장실, 저온저장고 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,944백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,944	563	2,354	27
국 비	1,191		1,177	14
시 도 비	357		353	4
시군구비	1,396	563	824	9
지 방 채
민간자본
기 타

* 2022년 소요액: 냉동탑차 구입비(사고이월)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  2.: 부지매입(563백만원)

○ 2020.  6.: 기본‧실시설계 용역 실시

○ 2020. 11.: 먹거리통합지원센터 건립 중간보고회

○ 2021.  1.: 기본‧실시설계 용역 완료

○ 2021.  4.: 공사업체 선정 및 계약

○ 2021.  9.: 참여 농가 조직화 설명회

○ 2021. 10.: 먹거리생산자회 결성 및 농산물 약정 체결

○ 2021. 12.: 공사 준공

□ 향후계획

○ 2022.  1.: 공공급식 관련 위원회 구성

○ 2022.  2.: 영업신고, 사업자등록 등 각종 행정절차 이행

○ 2022.  6.: 식재료 공급(배송)업체 선정

○ 2022.  7.: 공공급식통합플랫폼 도입 및 사용자 교육

○ 2022.  9.: 공공(학교)급식 시범사업 운영 개시

○ 2023.  3.: 전 학교(33개교) 대상 운영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

스마트축산 ICT 시범단지 조성사업

담당자

축산과 최대훈(☎670-4327)

□ 사업목적 및 필요성

○ ICT 기술이 적용된 스마트축산 단지 조성을 통해 최첨단 축산모델 제시

○ 냄새없는 축산환경 조성 및 가축 전염병의 과학적 관리

□ 사업개요

○ 기    간: 2020. 3 ~ 2023. 6

○ 위    치: 경남 고성군 거류면 감서리 산75-2번지 일원

○ 사업주체: 소가야스마트팜영농조합법인(대표 백길수)

○ 규    모: 40,000두 규모 현대화 양돈단지 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,369백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	65,369	200	22	1,755	63,392
국 비	14,792			2	14,790
시 도 비	2,682.5			0.5	2,682
시군구비	4,766.5	200	22	0.5	4,544
국비융자	33,747			1,402	32,345
민간자본	9,381			350	9,031
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020.  3.: 스마트축산 ICT 시범단지 조성 공모사업 선정(9,500백만 원)

- 국비(기금) 6,250 도비 1,625 군비 1,625

○ 2020.  4.: 타당성조사 완료(한국지방행정연구원)

○ 2020.  6.: 지방재정 투자심사 완료(행정안전부)

○ 2020.  9.: 지구단위계획, 전략환경영향평가 추진 업체 선정

○ 2020. 11.: 사업부지 지질조사 완료

○ 2021.  5.: 지구단위계획 구역 결정 입안제안 접수

○ 2021.  7.: 가축분뇨 공동자원화 시설 건립 공모사업 신청(11,750백만 원)

- 국비 4,700 도비 1,057.5 군비 2,467.5 융자 3,525

□ 향후계획

○ 2021. : 지구단위계획, 전략환경영향평가 추진

○ 2022. 3: 지구단위계획 및 환경영향평가 완료

○ 2022.  3. ~ 2022.  5.: 토목·건축공사 실시설계 및 인허가

○ 2022.  6. ~ 2023.  6.: 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

농산물가공지원센터 건립사업

담당자

농식품유통과 정기남(☎670-4816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산물가공지원센터 건립을 통해 농업인의 가공 활동·창업을 지원

○ 시설·장비 지원 및 기술보급을 통한 농외소득 증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 4. (2년)

○ 위 치 : 고성군 농업기술센터 내(고성군 고성읍 우산리 250-1번지)

○ 규 모 : 농산물가공지원센터 건립 1식(가공시설 1동, 가공장비67종84대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,024백만원[균특(전환) 1,012, 도비 184, 군비 828]

- 가공시설: 1,324백만원, 가공장비 700백만원

※ 예산집행율: 88%(1,785백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,785	36	1,567	182	0
국 비	892	18	783	91	0
시 도 비	167	2	138	27	0
시군구비	726	16	646	64	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  88%)

○ 21. 6. 11.: 농산물가공지원센터 준공

□ 향후계획

○ 22. 4.  6.: 가공장비 구축(67종 84대)

○ 22. 5.  2.: 농산물가공지원센터 운영

○ 22. 5. ~ 12.: 농산물가공지원센터 제품생산 및 실적평가

※ 시제품테스트(백향과워터젤리 외 12개 품목 진행중)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

행복교육지구 운영

담당자

교육청소년과 김미경(☎670-2613)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학교와 지역사회가 소통하고 협력을 통한 지역교육공동체 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 고성군 관내

○ 규 모 : 지역교육공동체 조성 및 마을학교, 학습공동체, 동아리 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원(군비 50%, 교육청비 50%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,400	600	600	600	600
국 비
시 도 비
시군구비	1,200	300	300	300	300
지 방 채
민간자본
기 타	1,200	300	300	300	300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 행복교육지구 운영 시행: 2021. 1.~

○ 행복교육지구 마을학교 등 공모선정 및 운영: 2021. 4~
○ 행복교육지구 마을학교 등 보조금 정산: 2021. 12.

□ 향후계획

○ 행복교육지구 운영관리: 연중

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 고성군에서 ′21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당사항 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 고성군에서 ′21년에 추진한 민간투자사업 현황은 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	해당없음
BTO	해당없음

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

우리 고성군에서 ′21년에 추진한 개별 민간투자사업 현황은 해당사항 없습니다.